◉산업통상자원부고시 제2022-19호

전원개발사업실시계획 변경

①산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 서순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ②산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148(2020.9.23)호로 고시된 바 있는 154kV 매월 기설송전선로 권원확보사업, ③산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148(2020.9.23)호로 고시된 바 있는 154kV 운남 기설송전선로 권원확보사업, ④산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017. 8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 벌교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<2차>, ⑤산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 신영주-안동 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑥산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 안동-풍산 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑦산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 영덕-진보 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑧산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 영덕-평해 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑨산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018.12.7)로 고시된 바 있는 154kV 인동 기설송전선로 권원확보사업, ⑩산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018.12.7)로 고시된 바 있는 345kV 신영주-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑪산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<4차>, ⑫산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30) 로 고시된 바 있는 154kV 영주-봉화 기설송전선로 권원확보사업, ⑬산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018.12.7)로 고시된 바 있는 154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업, ⑭산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 동안동-임하HP 기설송전선로 권원확보사업, ⑮산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 예천 기설송전선로 권원확보사업, ⑯산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 선산-산동 기설송전선로 권원확보사업, ⑰산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 선산-청리 기설송전선로 권원확보사업, ⑱산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2018-221호(2018.12.7)로 고시된 바 있는 154kV 예점 기설송전선로 권원확보사업, ⑲산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 의성 기설송전선로 권원확보사업, ⑳산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30) 로 고시된 바 있는 345kV 선산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 구고 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 구미 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 선금 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 영주 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 청리-상주 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 정주-고창 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 345kV 신옥천-신남원 기설송전선로 권원확보사업<3차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 정주-부안 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 이리-전주 기설송전선로 권원확보사업<3차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 의령-진주 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 의령-구룡 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 하동-남해 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 의령-함양 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 의령-이현 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 345kV 의령-산청양수 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 345kV 의령-하동화력 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 함양-거창 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26.)로 고시된 바 있는 345kV 신남원-의령 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 345kV 신김해-삼천포 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 쌍림-합천 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 고성-안정 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 한림정-삼계 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-30호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 하동-개양 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.08.30)로 고시된 바 있는 154kV 동읍-진영 기설송전선로 권원확보, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021.11.19)로 고시된 바 있는 345kV 신태백-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 대덕-덕진 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 아산-인주 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 옥산-장항 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 인주-탕정 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 전의-동천안 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 태안-안면 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 해미분기 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 345kV 신서산-태안화력 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 765kV 신서산-신안성 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 논산-은진 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 부여-논산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 서산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 신옥천-서대전 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 아산-온양 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 옥산-부여 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 장재-천안 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 한샘둔포 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 신계룡-은진 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 신옥천-남대전삼사 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 아산-보령화력 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 청양-보령화력 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 345kV 아산-화성 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2018-165호(2018.9.3), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 천안-전의 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 신당진-서산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 옥산-서천화력 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 대전충남지역 기설송전선로 철탑부지 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 아산-예산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 345kV 신서산-아산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26)로 고시된 바 있는 154kV 송탄-오성CC 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2017-109호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 감곡-여주 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 신의정부-내촌 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23)로 고시된 바 있는 154kV 양주-금촌 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-134호(2021.7.27)로 고시된 바 있는 154kV 용문 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 진접분기 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 내촌-포천 외 1개 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 동서울-청평 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 경기북부 남양주-가평방면 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2021-157호(2021.9.16)로 고시된 바 있는 154kV 청평HP-의암HP 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30), 산업통상자원부 고시 제2021-190호(2021.11.19)로 고시된 바 있는 154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2017-110호(2017.8.14), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2017-6호(2017.2.1), 산업통상자원부 고시 제2019-210호(2019.12.26), 산업통상자원부 고시 제2020-148호(2020.9.23), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 345kV 신포항-신월성NP12 기설송전선로 권원확보사업, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 신진천-진천 기설송전선로 권원확보사업<2차>, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15), 산업통상자원부 고시 제2021-147호(2021.8.30)로 고시된 바 있는 154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<3차>, 산업통상자원부 고시 제2019-161호(2019.10.15)로 고시된 바 있는 154kV 북충주-충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>, 산업통상자원부 고시 제2018-29호(2018.3.14), 산업통상자원부 고시 제2018-146호(2018.7.18), 산업통상자원부 고시 제2019-138호(2019.8.30)로 고시된 바 있는 345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항 및 같은법 시행령 제14조 4항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제 정보시스템(http://www.eum.go.kr)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 산업통상자원부 국가공간정보 보안관리규정(산업통상자원부훈령 제221호) 제9조 및 제10조에 의거 전력․통신․가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2022년 1월 27일

산업통상자원부장관

154kV 서순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서순천 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소재지 정정

○ 소유자 및 관계인 변동으로 인한 추가

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
소유자	강대형	강대윤 외 3명	3명 증가
관계인	-	김광실	1명 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
4	당초	전남 여수시 율촌면	산17	임	1,0711	53	전남 여수시 율촌면 상여리	강대형				구분지상권 상공(12-25m)
	변경	전남 여수시 율촌면 상봉리	산17	임	1,0711	53	순천시 옥천동 179-10	강대윤	근저당권	여천군 삼일면 중흥리 579	김광실	구분지상권 상공(12-25m)	소재지, 소유자 변경 및 관계인 추가
							순천시 옥천동 179-10	강목원
							광주 광산구 수완동 913 광주수완코오롱하늘채 110-503	강철원
							전남 여수시 웅천동 642	정철호

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

154kV 매월 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 매월 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지적분할 등으로 인한 원면적 변경

○ 소유자, 관계인 변동으로 인한 추가 및 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
원면적	1,019,361㎡	1,019,209㎡	152㎡ 감소
소유자	김아님 외 245명	김아님 외 241명	4명 감소
관계인	도곡농업협동조합 외 27명	도곡농업협동조합 외 28명	1명 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
46	당초	전남 화순군 도곡면 천암리	산55-2	임	4,661	737	전남 화순군 도곡면 신덕리 964	박기서				구분지상권 상공(21-50m)
							광주 운암동671	박낙식
	변경	전남 화순군 도곡면 천암리	산55-2	임	4,661	737	광주 운암동671	박낙식				구분지상권 상공(21-50m)	소유자 변경
							경기도 부천시 원종로107번길 14-11,104동801호(고강동,동광모닝스카이아파트)	박찬용
62	당초	전남 화순군화순읍 앵남리	721-3	전	9,917	761	전남 화순군 화순읍 앵남리 809	정봉일				구분지상권 상공(12-38m)
							전남 화순군 화순읍 앵남리 809	조오수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 805	조완수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 805	조철수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 809	조평수
	변경	전남 화순군화순읍 앵남리	721-3	전	9,917	761	화순군 화순읍 앵남리 809	정봉월				구분지상권 상공(12-38m)	소유자 변경
							화순군 화순읍 앵남리 809	조오수
							화순군 화순읍 앵남리 805	조완수
							화순군 화순읍 앵남리 805	조철수
							화순군 화순읍 앵남리 809	조평수
63	당초	전남 화순군화순읍 앵남리	산272	임	39,798	2,043	전남 화순군 화순읍 앵남리 809	정봉일				구분지상권 상공(12-38m)
							전남 화순군 화순읍 앵남리 809	조오수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 805	조완수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 805	조철수
							전남 화순군 화순읍 앵남리 809	조평수
	변경	전남 화순군화순읍 앵남리	산272	임	39,798	2,043	화순군 화순읍 앵남리 809	정봉월				구분지상권 상공(12-38m)	소유자 변경
							화순군 화순읍 앵남리 809	조오수
							화순군 화순읍 앵남리 805	조완수
							화순군 화순읍 앵남리 805	조철수
							화순군 화순읍 앵남리 809	조평수
67	당초	전남 나주시 남평읍 노동리	19-1	답	1,194	18	전남 나주군 남평면 노동리 103	김덕기				구분지상권 상공(23-41m)
	변경	전남 나주시 남평읍 노동리	19-1	답	1,068	18	전남 나주시 남평읍 노동길 5-21	김종길				구분지상권 상공(23-41m)	원면적 및 소유자 변경
70	당초	전남 나주시 남평읍 노동리	27-1	답	1,490	43	전남 나주시 남평읍 광촌리 463	편복동				구분지상권 상공(23-41m)
							전남 나주시 산포면 매성리 1011	편성안
							전남 광주 광산구 서창동 700	편일용
	변경	전남 나주시 남평읍 노동리	27-1	답	1,464	43	나주시 산포면 매성리 1011	편성안				구분지상권 상공(23-41m)	원면적 및 소유자 변경
							광주 광산구 서창동 700	편일용
							전남 나주시 남평읍 동촌로 300	편평옥
111	당초	광주 남구 양과동	1110	전	2,274	90	광주 남구 양과동 479-1	최욱진				구분지상권 상공(14-37m)
	변경	광주 남구 양과동	1110	전	2,274	90	광주 남구 광곡마을길 84(양과동)	최욱진	근저당권	광주 남구 포충로 581(지석동)	대촌농업협동조합	구분지상권 상공(14-37m)	주소변경 및 관계인 추가
121	당초	광주 남구 이장동	1016	답	2,326	439	광주 남구 임암동218	김광식	압류		광주광역시남구	구분지상권 상공(15-41m)
							광주 서구 금호동743-3 금호시영3단지아파트302-1009	김광호
							광주 남구 임암동218	김미선
							광주 남구 임암동 218	김수환
							광주 광산구 월곡동 538-2 부영아파트 205-1306	김영숙
							광주 남구 임암동 218	김원호
							광주 남구 임암동 218	김정숙
	변경	광주 남구 이장동	1016	답	2,326	439	광주 남구 봉선로37,102동1302호(주월동,봉선로광명메이루즈)	김성준	근저당권	광주 남구 대남대로169(주월동)(학림지점)	남광주농업협동조합	구분지상권 상공(15-41m)	소유자 변경, 관계인 말소 및 추가
							광주 남구 봉선로133번길4,1동1902호(봉선동,금호타운아파트)	김정님
							전남 순천시 왕지3길55,106동1402호(왕지동,두산위브아파트)	김정숙
122	당초	광주 남구 이장동	1012	답	3,000	532	광주 동구 소태동 602-8	조정님	근저당권/지상권	광주 남구 주월동1264-5(학운동지점)	남광주농업협동조합	구분지상권 상공(15-41m)
	변경	광주 남구 이장동	1012	답	3,000	532	광주 동구 학소로62번길 7-17, 201호(소태동)	조정님	근저당권	광주 남구 대남대로169(주월동)(학운동지점)	남광주농업협동조합	구분지상권 상공(15-41m)	주소 및 권리종류 변경

154kV 운남 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 운남 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지적분할로 인한 원면적 변경

○ 재측량으로 인한 편입면적 변경

○ 소유자 변동으로 인한 추가 및 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
원면적	113,507㎡	113,506㎡	1㎡ 감소
편입면적	5,861㎡	5,873㎡	12㎡ 증가
소유자	박창재 외 17명	박창재 외 21명	4명 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
2	당초	전남 함평군 함평읍 자풍리	산118-2	임	13,587	59	전남 무안군 무안읍 교촌리 989	김광룡				구분지상권 상공(21-38m)
	변경	전남 함평군 함평읍 자풍리	산118-2	임	13,587	59	전남 무안군 무안읍 교촌리 989	금녕김씨충의공파종중				구분지상권 상공(21-38m)	소유자변경
11	당초	전남 무안군 현경면 평산리	674-3	전	221	12	서울 서초 방배동 788-27 로얄빌라나-302	정현준				구분지상권 상공(10-36m)
	변경	전남 무안군 현경면 평산리	674-3	전	220	24	전남 무안군 현경면 원평산길 83-1	정현준				구분지상권 상공(10-36m)	주소 및 원면적, 편입면적 변경
17	당초	전남 무안군 현경면 평산리	950	전	2,542	790	전남 무안군 무안면 성동리 641	임춘택				구분지상권 상공(18-43m)
	변경	전남 무안군 현경면 평산리	950	전	2,,542	790	목포시 호남동1	임영수				구분지상권 상공(18-43m)	소유자 변경
							목포시 호남동1	임종수
							목포시 호남동1	임종환
							목포시남교동89	임진태
							목포시 호남동1	임춘택
18	당초	전남 무안군 현경면 평산리	951-5	전	4,311	215	전남 목포시 대성동 198-3	나주임씨 (임성래)				구분지상권 상공(18-43m)
	변경	전남 무안군 현경면 평산리	951-5	전	4,311	215	목포 대성동 198-3	나주임씨장수공파종중				구분지상권 상공(18-43m)	소유자 변경

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

154kV 벌교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 벌교-고흥 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지적 재측량으로 인한 편입면적 감소 및 철탑면적 추가

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
편입면적	126,491㎡	126,207㎡	284㎡ 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용․사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
308	당초	전남 고흥군 동강면 대강리	산96	임	28,582	704	전남 고흥군 대서면 금마리 234-1	장준환				구분지상권 상공(16.9∼42m)
	변경	전남 고흥군 동강면 대강리	산96	임	28,582	420	전남 고흥군 대서면 금마리 234-1	장준환				구분지상권 상공(16.9∼42m)	편입면적 감소

154kV 신영주-안동 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신영주-안동 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 안동-풍산 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 안동-풍산 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 영덕-진보 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영덕-진보 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 영덕-평해 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영덕-평해 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 인동 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 인동 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 신영주-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신영주-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<4차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 영포 기설송전선로 권원확보사업<4차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2016.04 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 영주-봉화 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영주-봉화 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.01 ∼ 2022.12	2017.01 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 단양 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 오기정정 및 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.04 ∼ 2022.12	2017.01 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 동안동-임하HP 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 동안동-임하HP 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.01 ∼ 2022.12	2017.01 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 예천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 예천 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.01 ∼ 2022.12	2017.01 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 선산-산동 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 선산-산동 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.02 ∼ 2022.12	2018.02 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 선산-청리 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 선산-청리 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.02 ∼ 2022.12	2018.02 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 예점 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 예점 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 오기정정 및 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.09 ∼ 2022.12	2018.02 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 의성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 의성 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.02 ∼ 2022.12	2018.02 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 선산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 선산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.02 ∼ 2022.12	2018.02 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 구고 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 구고 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.09 ∼ 2022.12	2019.09 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 구미 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 구미 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.09 ∼ 2022.12	2019.09 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 선금 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 선금 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.09 ∼ 2022.12	2019.09 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 영주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 영주 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.09 ∼ 2022.12	2019.09 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 청리-상주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청리-상주 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.09 ∼ 2022.12	2019.09 ∼ 2024.12	2년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 정주-고창 기설송전선로 권원확보사업<2차> (변경)

1. 사 업 명 : 154kV 정주-고창 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

○ 편입면적, 관계인, 소유자 주소 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ∼ 2022. 12	2018. 2 ∼2023. 12	1년 연장
편입면적	175,609㎡	175,497㎡	112㎡ 감소
관 계 인	고창새마을금고 외 67명	고창새마을금고 외 78명	11명 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
15	당초	전북 정읍시 하북동	493-1	답	2,364	229	전북 정읍시 연지동 19	황일섭				구분지상권 (상공 22-59m)
							전북 정읍시 하북동 554	황경수
							전북 김제군 봉남면 내광리 164-7	황규난
							전북 익산시 신용동 45	황경성
							전북 정읍시 하북동 658-1	황승룡
							전북 정읍시 연지동 14-8	황귀창
	변경	전북 정읍시 하북동	493-1	답	2,364	229	전북 정읍시 연지동 19	황일섭				구분지상권 (상공 22-59m)	관계인 추가
							전북 정읍시 하북동 554	황경수
							전북 김제군 봉남면 내광리 164-7	황규난
							전북 익산시 신용동 45	황경성
							전북 정읍시 하북동 658-1	황승룡
							전북 정읍시 연지동 14-8	황귀창	압류	강원도 원주시 건강로 32(반곡동, 국민건강보험공단)(정읍지사)	국민건강보험공단
44	당초	전북 정읍시 망제동	92-10	답	3,782	142	전북 정읍시 망제동 472	이정수	지상권	전북 정읍시 연지동 341-9 (정일지점)	정읍농업협동조합	구분지상권(상공14-54m)
	변경	전북 정읍시 망제동	92-10	답	3,782	142	전북 정읍시 망제동 472	이정수	지상권	전북 정읍시 연지동 341-9 (정일지점)	정읍농업협동조합	구분지상권(상공14-54m)	관계인 추가
									근저당권
									압류		전주시
67	당초	전북 정읍시 흑암동	396	답	2,602	358	전북 정읍시 흑암동 206	박복원				구분지상권(상공15-53m)
	변경	전북 정읍시 흑암동	396	답	2,602	358	전북 정읍시 상흑길 50(흑암동)	최정양	근저당권	정주시 시기동 325-2	정주시단위농업협동조합	구분지상권(상공15-53m)	소유자 변경, 관계인 추가
75	당초	전북 정읍시 용계동	산5-10	임	3,297	1,086	서울 용산구 청파동2가 1-80 청파맨션 301호	김은성	근저당권	서울 금천구 시흥동 789 한양아파트6동1114호	송명화	구분지상권 (상공20-54m)
									근저당권	서울 용산구 이태원동 5-18	민혜경
									근저당권	서울 강남구 논현동 110-23	김희오
									가압류	서울 종로구 연지동 136-74	서울보증보험㈜
	변경	전북 정읍시 용계동	산5-10	임	3,297	1,086	서울 용산구 청파동2가 1-80 청파맨션 1호	김은성	근저당권	서울 금천구 시흥동 789 한양아파트6동1114호	송명화	구분지상권 (상공20-54m)	관계인 추가, 관계인 주소 변경
									근저당권	서울 용산구 이태원동 5-18	민혜경
									근저당권	서울 강남구 논현동 110-23	김희오
									가압류	서울 종로구 연지동 136-74 (소관 : 강남신용지원단)	서울보증보험 주식회사
										서울시 마포구 공덕동 254-5 (서울서 부채권 추심1팀)	신용보증기금
									압류		용산 세무서
											시흥 세무서
											김천 세무서
											용산구
80	당초	전북 정읍시 용계동	604-1	답	473	180	전북 정읍시 서부산업도로 409(주공아파트) 101-205	김병국	근저당권	전북 정읍시 정우면 초강리 107-3	샘골농업협동조합	구분지상권 (상공29-52m)
	변경	전북 정읍시 용계동	604-1	답	473	180	전북 정읍시 서부산업도로 409(주공아파트) 101-205	김병국	근저당권				관계인 삭제
84	당초	전북 정읍시 용계동	684	답	770	74	전북 정읍시 용계동 664-1	최영현	근저당권	전북 정읍시 명덕로 25	정읍농업협동조합	구분지상권 (상공11-38m)
	변경	전북 정읍시 용계동	684	답	770	74	전북 정읍시 신덕중앙길 51-27(용계동)	최효신	근저당권	전북 정읍시 명덕로 25(연지동) (정일지점)	정읍농업협동조합	구분지상권 (상공11-38m)	소유자 변경, 관계인 주소 변경
87	당초	전북 정읍시 용계동	686	답	2,557	295	전북 정읍시 용계동 619-1	임경택	근저당권	전북 정읍시 수성동 734-6	정읍원예농업협동조합	구분지상권 (상공10-34m)
									지상권
	변경	전북 정읍시 용계동	686	답	2,557	295	전북 정읍시 신덕중앙길 77(용계동)	장순례	근저당권	전북 정읍시 수성동 734-6	정읍원예농업협동조합	구분지상권 (상공10-34m)	소유자 변경
									지상권
109	당초	전북 정읍시 소성면 등계리	962	답	1,676	192	전북 정읍시 소성면 등계리 92	손원일				구분지상권 (상공26-51m)
	변경	전북 정읍시 소성면 등계리	962	답	1,676	192	전북 정읍시 입암면 지선길 27	김미량	근저당권	전북 정읍시 고부면 영주로 557 (입암지점)	황토현농업협동조합	구분지상권 (상공26-51m)	소유자 변경, 관계인 추가
									지상권	전북 정읍시 고부면 영주로 557
113	당초	전북 정읍시 소성면 등계리	34-1	주	2,465	223	전북 정읍시 상동 110 현대아파트 102-802	이선옥	근저당권	전북 정읍시 중앙1길 76 (수성동)	정읍새마을금고	구분지상권 (상공18-41m)
	변경	전북 정읍시 소성면 등계리	34-1	주	2,465	223	전북 정읍시 정읍남로 1400, 106동 1404호(시기동 ,정읍코아루천년가아파트)	이선옥	근저당권	전북 정읍시 중앙1길 76 (수성동)	정읍새마을금고	구분지상권 (상공18-41m)	소유자 주소 변경, 관계인 추가
										서울시 종로구 종로 26(서린동)	에스케이에너지주식회사
118	당초	전북 정읍시 소성면 등계리	170-16	잡	3,175	436	전북 정읍시 신태인읍 정신로 1162-1	임상복	근저당권	전북 정읍시 중앙1길 76 (수성동)	정읍새마을금고	구분지상권 (상공16-42m)
									지상권
	변경	전북 정읍시 소성면 등계리	170-16	잡	3,175	436	전북 정읍시 소성면 소성로 394	유한회사오선철강	근저당권	광주시 동구 제봉로 225(대인동) (계림지점)	주식회사광주은행	구분지상권 (상공16-42m)	소유자 변경, 관계인 삭제 및 추가
122	당초	전북 정읍시 소성면 등계리	산36	임	9,382	54	경기 성남시 분당구 서현동300 효자촌 103-1004	권태선	근저당권	서울 강남구 논현동 241-8	주식회사신원목재	지상권 또는 소유권
									지상권
							서울 노원구 하계동 354 학여울청구아파트 113-1504	권지영	근저당권
									지상권
						509	경기 성남시 분당구 서현동300 효자촌 103-1004	권태선	근저당권			구분지상권 (상공23-46m)
									지상권
							서울 노원구 하계동 354 학여울청구아파트 113-1504	권지영	근저당권
							서울 노원구 하계동 354 학여울청구아파트 113-1504	권지영	지상권
	변경	전북 정읍시 소성면 등계리	산36	임	9,382	54	경기 성남시 분당구 서현동300 효자촌 103-1004	권태선				지상권 또는 소유권	관계인 삭제
							서울 노원구 하계동 354 학여울청구아파트 113-1504	권지영
						509						구분지상권 (상공23-46m)
141	당초	전북 정읍시 소성면 등계리	446	답	2,602	165	전북 정읍시 소성면 신천리 99	권직				구분지상권 (상공17-41m)
							전북 정읍시 소성면 신천리 107	권구남
							전북 정읍시 소성면 등계리 336	권구현
							전북 정읍시 소성면 등계리 350	권구철
							전북 정읍시 소성면 등계리 646	권진병
							전북 정읍시 소성면 등계리 317	권원칠
							전북 정읍시 소성면 등계리 314	권진남
							전북 정읍시 소성면 등계리 348	권덕심
							전북 정읍시 소성면 등계리 311	권승철
							전북 정읍시 소성면 등계리 323	권기봉
	변경	전북 정읍시 소성면 등계리	446	답	2,602	173	전북 정읍시 소성면 신천리 99	권직				구분지상권 (상공17-41m)	편입면적 증가
							전북 정읍시 소성면 신천리 107	권구남
							전북 정읍시 소성면 등계리 336	권구현
							전북 정읍시 소성면 등계리 350	권구철
							전북 정읍시 소성면 등계리 646	권진병
							전북 정읍시 소성면 등계리 317	권원칠
							전북 정읍시 소성면 등계리 314	권진남
							전북 정읍시 소성면 등계리 348	권덕심
							전북 정읍시 소성면 등계리 311	권승철
							전북 정읍시 소성면 등계리 323	권기봉
161	당초	전북 정읍시 소성면 중광리	58	전	3,848	619	전북 정읍시 연지3길 27(연지동)	최숙자	근저당권	전북 정읍시 명덕1길 64 (수성동)	정읍산림조합	구분지상권 (상공35-60m)
									지상권
	변경	전북 정읍시 소성면 중광리	58	전	3,848	622	전북 정읍시 소성면 원천중앙길 43-38	최숙자	근저당권	전북 정읍시 명덕1길 64 (수성동)	정읍산림조합	구분지상권 (상공35-60m)	편입면적 증가
									지상권
163	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산2	임	7,736	715	전북 정읍시 소성면 중광리 65	김용식				구분지상권 (상공14-47m)
							전북 정읍시 덕천면 달천리 269	김용남
							전북 정읍시 소성면 중광리 439	김용식
							전북 정읍시 소성면 중광리 65	김용선
							전북 정읍시 덕천면 달천리 1	김용선
							전북 정읍시 신태인읍 신태인리 1	김동술
							전북 정읍시 소성면 중광리 40	김계중
							전북 정읍시 소성면 중광리 48	김대중
							전북 정읍시 소성면 중광리 5	김길중
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산2	임	7,736	710	전북 정읍시 소성면 중광리 65	김용식				구분지상권 (상공14-47m)	편입면적 감소
							전북 정읍시 덕천면 달천리 269	김용남
							전북 정읍시 소성면 중광리 439	김용식
							전북 정읍시 소성면 중광리 65	김용선
							전북 정읍시 덕천면 달천리 1	김용선
							전북 정읍시 신태인읍 신태인리 1	김동술
							전북 정읍시 소성면 중광리 40	김계중
							전북 정읍시 소성면 중광리 48	김대중
							전북 정읍시 소성면 중광리 5	김길중
166	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산14	임	2,347	469	전북 정읍시 연지동 319	이종구				구분지상권 (상공28-55m)
							서울 관악구 신림동 95-100	이종윤	가압류	서울 중구 남대문로5가 84-11, 연세세브란스빌딩 19층	재단법인한국장학재단
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산14	임	2,347	504	전북 정읍시 연지동 319	이종구				구분지상권 (상공28-55m)	편입면적 증가
							서울 관악구 신림동 95-100	이종윤	가압류	서울 중구 남대문로5가 84-11, 연세세브란스빌딩 19층	재단법인한국장학재단
168	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산18-1	임	8,529	1,115	서울 중랑구 상봉동 484 쌍용아파트 1301-404	오학서				구분지상권 (상공12-40m)
							전북 정읍시 시기동 523 유창파크맨션 101-608	오창호
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산18-1	임	8,529	1,131	서울 중랑구 상봉동 484 쌍용아파트 1301-404	오학서				구분지상권 (상공12-40m)	편입면적 증가
							전북 정읍시 시기동 523 유창파크맨션 101-608	오창호
178	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	83-2	답	1,458	396	전북 정읍시 소성면 원천중앙길 31-7	손원일	근저당권	전북 정읍시 고부면 영주로 557 (소성지점)	황토현농업협동조합	구분지상권 (상공13-38m)
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	83-2	답	1,458	388	전북 정읍시 소성면 원천중앙길 31-7	손원일	근저당권	전북 정읍시 고부면 영주로 557 (소성지점)	황토현농업협동조합	구분지상권 (상공13-38m)	편입면적 감소
180	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	492-8	답	1,852	308	전북 고창군 아산면 반암리 594	울산김씨송오공택휴파종중				구분지상권 (상공10-33m)
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	492-8	답	1,852	309	전북 고창군 아산면 반암리 594	울산김씨송오공택휴파종중				구분지상권 (상공10-33m)	편입면적 증가
181	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	492-7	답	1,662	330	전북 정읍시 시기동 177-12	유내춘				구분지상권 (상공11-33m)
							전북 고창군 흥덕면 신송리 331	유기오
							전북 정읍시 연지동 287	유대흥	가압류	전북 정읍시 연지동 44-9	서부새마을금고
									압류		정읍시
									가압류	서울 중구 다동 33	파산자샘골신용협동조합파산관재인예금보험공사
							전북 정읍시 신태인읍 신덕리 585	유인성
							전북 정읍시 소성면 중광리 10	유특기
							전북 정읍시 소성면 중광리 26	유흥문
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	492-7	답	1,662	332	전북 정읍시 시기동 177-12	유내춘				구분지상권 (상공11-33m)	편입면적 증가
							전북 고창군 흥덕면 신송리 331	유기오
							전북 정읍시 연지동 287	유대흥	가압류	전북 정읍시 연지동 44-9	서부새마을금고
									압류		정읍시
									가압류	서울 중구 다동 33	파산자샘골신용협동조합파산관재인예금보험공사
							전북 정읍시 신태인읍 신덕리 585	유인성
							전북 정읍시 소성면 중광리 10	유특기
							전북 정읍시 소성면 중광리 26	유흥문
195	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	383	답	2,377	646	전북 정읍시 소성면 중광리 163	장맹현				구분지상권 (상공13-42m)
							전북 정읍군 소성면 중광리 163	장맹호
							서울 강남구 논현동 191-2	장길현
							전북 정읍시 소성면 등계리 214	장학현
							서울 성동구 금호동3가 810	장도현
							서울 성동구 자양동 231-14	장동하
							서울 관악구 신림동 637-11	장목하
							서울 종로구 옥인동 34-1	장황하
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	383	답	2,377	649	전북 정읍시 소성면 중광리 163	장맹현				구분지상권 (상공13-42m)	편입면적 증가
							전북 정읍군 소성면 중광리 163	장맹호
							서울 강남구 논현동 191-2	장길현
							전북 정읍시 소성면 등계리 214	장학현
							서울 성동구 금호동3가 810	장도현
							서울 성동구 자양동 231-14	장동하
							서울 관악구 신림동 637-11	장목하
							서울 종로구 옥인동 34-1	장황하
196	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산78	임	1,766	20	전북 정읍시 입암면 지선길 53	정한용				지상권 또는 소유권
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산78	임	1,766	20	전북 정읍시 입암면 지선길 53	정한용				지상권 또는 소유권	소유자 추가
							전북 전주시 덕진구 우아동 2가 885-1	정계용
199	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산80	임	8,926	454	전북 전주시 덕진구 우아동 2가 885-1	정계용				구분지상권 (상공18-41m)
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산80	임	8,926	411	전북 전주시 덕진구 우아동 2가 885-1	정계용				구분지상권 (상공18-41m)	편입면적 감소
200	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산79	임	12,595	1,793	서울 영등포구 문래동6가 101 문래동현대홈시티 102-402	이정욱				구분지상권(상공15-53m)
							전북 정주읍 연지리 35-1	이두형
							전북 정주읍 연지리 35-22	이주형
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산79	임	12,595	1,715	서울 영등포구 문래동6가 101 문래동현대홈시티 102-402	이정욱				구분지상권 (상공15-53m)	편입면적 감소
							전북 정주읍 연지리 35-1	이두형
							전북 정주읍 연지리 35-22	이주형
202	당초	전북 정읍시 입암면 지선리	산79	임	12,595	1,793	전북 정주읍 수성리 465	이대형				구분지상권 (상공15-53m)
							전북 정읍시 고부면 덕안리 614	이재홍
	변경	전북 정읍시 입암면 지선리	산79	임	12,595	1,715	광주광역시 북구 각화대로 33, 1동 103호(각화동, 금호타운상가)	이재명				구분지상권 (상공15-53m)	소유자 변경, 편입면적 감소
							전북 정읍시 고부면 덕안리 614	이재홍
222	당초	전북 정읍시 입암면 봉양리	20-1	임	21,917	45	전북 정읍시 입암면 봉양리 22	이종규				지상권 또는 소유권
							전북 정읍시 입암면 봉양리 7	이막동
							전북 정읍시 입암면 봉양리 30	이종렬
							전북 정읍시 입암면 봉양리 16	이만덕
							전북 정읍시 입암면 봉양리 37	이시국
							전북 정읍시 입암면 봉양리 7	이일웅
							전북 정읍시 입암면 지선리 279	이정곤
						3,261	전북 정읍시 입암면 봉양리 22	이종규				구분지상권 (상공11-43m)
							전북 정읍시 입암면 봉양리 7	이막동
							전북 정읍시 입암면 봉양리 30	이종렬
							전북 정읍시 입암면 봉양리 16	이만덕
							전북 정읍시 입암면 봉양리 37	이시국
							전북 정읍시 입암면 봉양리 7	이일웅
							전북 정읍시 입암면 지선리 279	이정곤
	변경	전북 정읍시 입암면 봉양리	20-1	임	21,917	45	전북 정읍시 입암면 봉양리 22	이종규				지상권 또는 소유권	편입면적 감소, 소유자 변경
							전북 정읍시 입암면 봉양리 산1	고부이씨병조판서공파종중화수회
							전북 정읍시 입암면 봉양리 30	이종렬
						3,250	전북 정읍시 입암면 봉양리 16	이만덕				구분지상권 (상공11-43m)
							전북 정읍시 입암면 봉양리 37	이시국
							전북 정읍시 입암면 봉양리 7	이일웅
							전북 정읍시 입암면 지선리 279	이정곤
233	당초	전북 정읍시 입암면 단곡리	1062-1	답	879	78	전북 정읍시 입암면 단곡리 987	유태평	가압류	전북 정읍시 수성동 588-1	정읍새마을금고	구분지상권 (상공43-67m)
	변경	전북 정읍시 입암면 단곡리	1062-1	답	879	78	전북 정읍시 입암면 단곡리 987	유태평				구분지상권 (상공43-67m)	관계인 삭제
245	당초	전북 정읍시 입암면 연월리	산48	임	50,281	885	전북 정읍시 입암면 단곡리 1014	고흥류씨중추부사				구분지상권 (상공16-40m)
	변경	전북 정읍시 입암면 연월리	산48	임	50,281	885	전북 정읍시 입암면 단곡리 1014	고흥유씨중추부사공파종중				구분지상권 (상공16-40m)	소유자 이름 변경
248	당초	전북 정읍시 입암면 연월리	산60-3	임	99	66	전북 정읍시 입암면 연월리 609	강현수				구분지상권 (상공28-52m)
	변경	전북 정읍시 입암면 연월리	산60-3	임	99	75	전북 정읍시 입암면 연월리 609	강현수				구분지상권 (상공28-52m)	편입면적 증가
254	당초	전북 정읍시 입암면 연월리	산77	임	148,264	1,321	전북 고창군 성내면 양계리 343	전주이씨경녕군파원우공종중				구분지상권 (상공14-60m)
	변경	전북 정읍시 입암면 연월리	산77	임	148,264	1,355	전북 고창군 성내면 양계리 343	전주이씨경녕군파원우공종중				구분지상권 (상공14-60m)	편입면적 증가

345kV 신옥천-신남원 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신옥천-신남원 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

○ 소유자 및 편입면적 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ∼ 2022. 12	2018. 2 ∼2023. 12	1년 연장
편입면적	136,929㎡	136,226㎡	703㎡ 감소
소 유 자	오영렬 외 290명	오영렬 외 289명	1명 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
74	당초	전북 장수군 장수읍 개정리	697-2	도로	407	198	전북 장수군 장수읍 개정리	류경진				구분지상권 (상공7-51m)
	변경	전북 장수군 장수읍 개정리	697-2	도로	407	198		미등기				구분지상권 (상공7-51m)	소유자 삭제 (미등기 필지)
196	당초	전북 진안군 안천면 백화리	473	전	1,501	1,269	전북 진안군 안천면 백화리 595	김성수				구분지상권 (상공 6.5-51.8m)
	변경	전북 진안군 안천면 백화리	473	전	1,501	566	전북 진안군 안천면 백화리 595	김성수				구분지상권 (상공 6.5-51.8m)	편입면적 감소

154kV 정주-부안 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 정주-부안 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 비고(상공 높이) 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
비 고	구분지상권(상공 미등기)	구분지상권(상공 14-40m)	상공 높이 오기정정

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
57	당초	전북 정읍시 덕천면 하학리	산88-6	목	48,027	947	경기 수원시 장안구 경수대로 759 (연무동)	문일현				구분지상권 (상공 미등기)	비고 변경 (상공 높이 추가)
	변경	전북 정읍시 덕천면 하학리	산88-6	목	48,027	947	경기 수원시 장안구 경수대로 759(연무동)	문일현				구분지상권 (상공14-40m)

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

154kV 이리-전주 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 이리-전주 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 2 ∼ 2022. 12	2018. 2 ∼2023. 12	1년 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 의령-진주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 의령-진주 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 의령-구룡 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 의령-구룡 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 하동-남해 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 하동-남해 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 의령-함양 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 의령-함양 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 의령-이현 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 :  154kV 의령-이현 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 의령-산청양수 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 의령-산청양수 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 의령-하동화력 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 의령-하동화력 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 함양-거창 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 함양-거창 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 신남원-의령 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신남원-의령 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 신김해-삼천포 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신김해-삼천포 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 쌍림-합천 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 쌍림-합천 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 고성-안정 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고성-안정 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 한림정-삼계 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 :  154kV 한림정-삼계 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 하동-개양 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 하동-개양 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 담당자 입력 착오로 인한 사업기간 정정

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업 시행기간	2017. 09. 01 ~ 2023. 12. 31.	2018. 02. ~ 2025. 12. 31.	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 동읍-진영 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 동읍-진영 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지상고 재측량으로 인한 상공높이 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
상공높이	구분지상권(31-67m)	구분지상권(24-60m)	재측량으로 인한 상공높이 변경

※기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
94	당초	경남 김해시 진영읍 하계리	14-1	전	2,086	134	경남 김해시 진영읍 여래리 790-2 원창시인의마을아파트 102-502	김인숙				구분지상권 (상공31-67m)
							경남 김해시 삼안로 195번길 20-19	임경애	근저당권	경남 김해시 한림면 한림로 377	한림농업협동조합
	변경	경남 김해시 진영읍 하계리	14-1	전	2,086	134	경남 김해시 진영읍 여래리 790-2 원창시인의마을아파트 102-502	김인숙				구분지상권 (상공24-60m)	지상고 재측량으로 인한 상공높이 변경
							경남 김해시 삼안로 195번길 20-19	임경애	근저당권	경남 김해시 한림면 한림로 377	한림농업협동조합

345kV 신태백-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신태백-한울NP2 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 재측량으로 인한 편입면적 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
편입면적	100,858㎡	101,605㎡	747㎡ 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
50 (74,75)	당초	강원 삼척시 가곡면 동활리	산7	임야	24,794	1,555	삼척군 원덕읍 동활리 189	윤송근	지상권	서울 강남구 서초동 592 무지개@ 5-1209	이성렬	구분지상권 (상공37-75m)
	변경	강원 삼척시 가곡면 동활리	산7	임야	24,794	2,302	삼척군 원덕읍 동활리 189	윤송근	지상권	서울 강남구 서초동 590 무지개아파트 5동 1209호	이성렬	구분지상권 (상공37-75m)	재측량으로 인한 편입면적 변경, 관계인 주소 오기 정정

154kV 대덕-덕진 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 대덕-덕진 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 아산-인주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아산-인주 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 옥산-장항 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 옥산-장항 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 인주-탕정 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 인주-탕정 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 전의-동천안 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 전의-동천안 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 태안-안면 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 태안-안면 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 해미분기 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 해미분기 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 신서산-태안화력 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신서산-태안화력 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

765kV 신서산-신안성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 765kV 신서산-신안성 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 논산-은진 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 논산-은진 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 부여-논산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 부여-논산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 서산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 서산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 신옥천-서대전 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신옥천-서대전 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 아산-온양 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아산-온양 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 옥산-부여 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 옥산-부여 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 장재-천안 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 장재-천안 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 한샘둔포 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 한샘둔포 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 신계룡-은진 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신계룡-은진 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 신옥천-남대전삼사 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신옥천-남대전삼사 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.10.1 ∼ 2022.12.31	2017.10.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 아산-보령화력 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아산-보령화력 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 청양-보령화력 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청양-보령화력 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 아산-화성 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 아산-화성 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 천안-전의 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 천안-전의 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 신당진-서산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신당진-서산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 옥산-서천화력 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 옥산-서천화력 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

대전충남지역 기설송전선로 철탑부지 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 대전충남지역 기설송전선로 철탑부지 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 아산-예산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 아산-예산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2019.9.1 ∼ 2022.12.31	2019.9.1 ∼ 2024.12.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

345kV 신서산-아산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신서산-아산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 원면적 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
원면적	984,957.5㎡	984,948.5㎡	9㎡ 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
132 (60)	당초	충남 당진시 면천면 문봉리	187-8	답	510	182	경기 하남시 덕풍동로 7-5 (덕풍동)	권오철				구분지상권 (상공8-53m)
	변경	충남 당진시 면천면 문봉리	187-8	답	501	182	경기 하남시 덕풍동로 7-5 (덕풍동)	권오철				구분지상권 (상공8-53m)	착오기재

154kV 송탄-오성CC 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 송탄-오성CC 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자와의 지속적 협의 필요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.4.1 ∼ 2022.3.31	2016.4.1 ∼ 2024.3.31	24개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 감곡-여주 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 감곡-여주 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 분할 및 착오입력등으로 인한 지번, 원면적, 편입면적 변경

○ 소유자, 관계인 및 지목 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
원 면 적	5,653,734㎡	5,651,204㎡	2,530㎡ 감소
편입면적	82,370㎡	82,317㎡	53㎡ 감소
소 유 자	김호영 등 185명	김의균 등 189명	4명 추가
관 계 인	여주농업협동조합 등 33명	여주농업협동조합 등 32명	1명 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
25 (30~31)	당초	경기 여주시 점동면 장안리	369	전	1,243	371	서울 송파구 신천동 11 장미3차아파트 2동 103호	김호영				구분지상권 (상공24-46m)
	변경	경기 여주시 점동면 장안리	369	전	1,243	371	서울 성동구 마장로 271, 103동 502호(마장동, 삼성아파트)	김의균				구분지상권 (상공24-46m)	소유자 변경
							서울 성동구 마장로 271, 103동 502호(마장동, 삼성아파트)	김의연
							서울 광진구 영화사로 50, 501호(중곡동)	김의준
							충북 청주시 청원구 덕벌로 31번길 28-1, 302호(내덕동)	김의호
							서울 성동구 마장로 271, 103동 502호(마장동, 삼성아파트)	황선희
37 (40~41)	당초	경기 여주시 점동면 도리	산37-1	임	6,248	953	서울 서초구 우면동 255-8	김남숙				구분지상권 (상공17-41m)
	변경	경기 여주시 점동면 도리	산37	임	6,248	953	서울 서초구 우면동 255-8	김남숙				구분지상권 (상공17-41m)	착오로 인한 편입지번 변경
56 (51~52)	당초	경기 여주시 점동면 흔암리	305-1	답	808	137	경기 여주군 점동면 흔암리 14	신광승				구분지상권 (상공18-40m)
	변경	경기 여주시 점동면 흔암리	305-1	답	808	137	서울 금천구 금하로 816, 501동1103호 (시흥동,벽산아파트)	김신희	근저당	서울 금천구 남부순환로 1366(독산동)(금천지점)	관악농업협동조합	구분지상권 (상공18-40m)	소유자 및 관계인 변경
57 (51~52)	당초	경기 여주시 점동면 흔암리	305	답	731	127	경기 여주군 점동면 흔암리 14	신광승				구분지상권 (상공18-40m)
	변경	경기 여주시 점동면 흔암리	305	답	731	127	서울 금천구 금하로 816, 501동1103호 (시흥동,벽산아파트)	김신희	근저당	서울 금천구 남부순환로 1366(독산동)(금천지점)	관악농업협동조합	구분지상권 (상공18-40m)	소유자 및 관계인 변경
70 (51~52)	당초	경기 여주시 점동면 흔암리	262	전	2,416	252	경기 여주군 점동면 흔암리 266	홍락표				구분지상권 (상공18-36m)
	변경	경기 여주시 점동면 흔암리	262	전	2,416	214	경기 여주군 점동면 흔암리 266	홍락표				구분지상권 (상공18-36m)	편입면적 오기정정
84 (53~54)	당초	경기 여주시 점동면 흔암리	173-1	답	3,367	1,056	경기 여주군 점동면 처리 189	한예덕				구분지상권 (상공8-32m)
	변경	경기 여주시 점동면 흔암리	173-1	답	3,367	1,056	인천 연수구 먼우금로252번길 27-4(연수동)	한재삼				구분지상권 (상공8-32m)	소유자 변경
94 (55~56)	당초	경기 여주시 멱곡동	288-9	답	2,689	784	경기 여주군 여주읍 멱곡리 288	박준오	근저당	경기 의왕시 포일동 487 (여주이천지사)	농업기반공사	구분지상권 (상공13-40m)
	변경	경기 여주시 멱곡동	288-9	답	2,689	784	경기 여주군 여주읍 멱곡리 288	박준오				구분지상권 (상공13-40m)	관계인 삭제
100 (57~58)	당초	경기 여주시 멱곡동	221	답	3,451	694	경기 여주군 여주읍 멱곡1길 21	김정순	근저당	경기 의왕시 포일동 487 (여주이천지사)	한국농어촌공사	구분지상권 (상공12-31m)
	변경	경기 여주시 멱곡동	221	답	3,451	694	전남 나주시 그린로 20 (빛가람동)	한국농어촌공사				구분지상권 (상공12-31m)	소유자 변경 및 관계인 삭제
118 (59~60)	당초	경기 여주시 멱곡동	187-5	전	1,987	401	경기 여주군 여주읍 멱곡리 396	박인성	근저당	경기 주군 여주읍 하리 324-2	여주농업협동조합	구분지상권 (상공17-41m)
									지상권		여주농업협동조합
	변경	경기 여주시 멱곡동	187-5	전	1,772	401	경기 여주군 여주읍 멱곡리 396	박인성	근저당	경기 주군 여주읍 하리 324-2	여주농업협동조합	구분지상권 (상공17-41m)	분할로 인한 원면적변경
									지상권	여주농업협동조합	여주농업협동조합
140 (64~65)	당초	경기 여주시 능현동	51	답	2,975	63	경기 여주시 명성로 192-42 (능현동)	김명원	근저당	경기 여주군 여주읍 하리 324-2	여주농업협동조합	구분지상권 (상공15-35m)
									근저당	서울 중구 충정로1가 75	여주농업협동조합
									근저당	경기 여주시 우암로 6 (세종지점)	여주농업협동조합
	변경	경기 여주시 능현동	51	대	660	63	경기 여주시 명성로 192-42 (능현동)	김명원	근저당	경기 여주군 여주읍 하리 324-2	여주농업협동조합	구분지상권 (상공15-35m)	분할로 인한 원면적 및 지목변경
									근저당	서울 중구 충정로1가 75	여주농업협동조합
									근저당	경기 여주시 우암로 6 (세종지점)	여주농업협동조합
156 (72~73)	당초	경기 여주시 교동	산4-50	임	2,777	228	서울 강남구 방배동 988-1 신동아아파트 3동 501호	전화성	근저당	서울 중구 남대문로2가 9-1 (방배남지점)	주식회사국민은행	구분지상권 (상공22-59m)
	변경	경기 여주시 교동	산4-50	임	2,777	213	서울 강남구 방배동 988-1 신동아아파트 3동 501호	전화성	근저당	서울 중구 남대문로2가 9-1 (방배남지점)	주식회사국민은행	구분지상권 (상공22-59m)	재측량으로 인한 편입면적 변경

154kV 신의정부-내촌 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신의정부-내촌 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 양주-금촌 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 양주-금촌 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 용문 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 용문 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 진접분기 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 진접분기 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 내촌-포천 외 1개 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 내촌-포천 외 1개 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 동서울-청평 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 동서울-청평 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

경기북부 남양주-가평방면 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 경기북부 남양주-가평방면 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.9.1 ∼ 2022.12.31	2018.2.1 ∼ 2022.12.31	오기 정정

※ 기타사항 변경없음

154kV 청평HP-의암HP 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 청평HP-의암HP 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 재측량으로 인한 구분지상권 상공높이 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
구분지상권 상공높이	구분지상권 (상공15-38m)	구분지상권 (상공10-34m)	상공높이 변경

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
1 (38-39)	당초	경기 가평군 가평읍 달전리	548-18	임	396	58	경기 의정부시 가능로50번길 39-9(가능동)	고종익				구분지상권 (상공15-38m)
							경기 안양시 동안구 평촌동 897-5 초원아파트 606-803	나종필
							경기 의왕시 오전동 853-29, -비01	이은아
	변경	경기 가평군 가평읍 달전리	548-18	임	396	58	경기 의정부시 가능로50번길 39-9(가능동)	고종익				구분지상권 (상공10-34m)	재측량으로 인한 구분지상권 상공높이 변경
							경기 안양시 동안구 평촌동 897-5 초원아파트 606-803	나종필
							경기 의왕시 오전동 853-29, -비01	이은아

154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 고령-다산 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정　승　일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 편입면적 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.1.1. ～ 2022.12.31.	2017.1.1. ～ 2024.12.31.	2년 연장
편입면적	90,201㎡	90,545㎡	344㎡ 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
63	당초	경북 고령군 성산면 고탄리	산61	임	59,901	1	경북 고령군 성산면 고탄동 251	이원만				지상권 또는 소유권
						1,818						구분지상권 (상공15-50m)
	변경	경북 고령군 성산면 고탄리	산61	임	59,901	2,163	경북 고령군 성산면 고탄동 251	이원만				구분지상권 (상송15-50m)	편입면적 변경

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 논공-유가 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 편입면적 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017.1.1. ～ 2022.12.31.	2017.1.1. ～ 2024.12.31.	2년 연장
편입면적	71,108㎡	71,049㎡	59㎡ 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
128	당초	대구 달성군 유가면 쌍계리	산54-2	임	595	177	대전 유성구 죽동로 321, 106동 2402호 (죽동,금성백조예미지아파트)	김원태	지상권	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사	구분지상권 (상공45-67m)
	변경	대구 달성군 유가면 쌍계리	산54-2	임	595	118	대전 유성구 죽동로 321, 106동 2402호 (죽동,금성백조예미지아파트)	김원태	지상권	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사	구분지상권 (상공45-67m)	편입면적 변경

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

345kV 신포항-신월성NP12 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신포항-신월성NP12 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 사업기간 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2016.4.1. ∼ 2022.3.31.	2016.4.1. ∼ 2022.12.31.	9개월 연장

※ 기타사항 변경없음

154kV 신진천-진천 기설송전선로 권원확보사업<2차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 신진천-진천 기설송전선로 권원확보사업<2차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자 변경

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
소유자	박진준 등 26명	이신근 등 14명	12명 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
1	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	710	답	1,554	270	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공30-55m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	710	답	1,554	270	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공30-55m)	소유자 변경
2	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	712	답	3,140	410	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공32-57m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	712	답	3,140	410	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공32-57m)	소유자 변경
3	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	721	답	2,664	495	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공27-52m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	721	답	2,664	495	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공27-52m)	소유자 변경
4	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	728	답	1,560	430	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공28-53m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	728	답	1,560	430	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공28-53m)	소유자 변경
5	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	731	답	2,417	755	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공25-50m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	731	답	2,417	755	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공25-50m)	소유자 변경
6	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	730	답	1,455	53	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공26-51m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	730	답	1,455	53	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공26-51m)	소유자 변경
7	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	732	답	1,352	299	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공25-50m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	732	답	1,352	299	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공25-50m)	소유자 변경
9	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	733-7	답	750	189	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공26-51m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	733-7	답	750	189	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공26-51m)	소유자 변경
10	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	733-5	답	3,183	467	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공26-51m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	733-5	답	3,183	467	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공26-51m)	소유자 변경
11	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	733-6	전	1,792	391	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공27-52m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	733-6	전	1,792	391	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공27-52m)	소유자 변경
12	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	711	답	1,732	326	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공30-55m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	711	답	1,732	326	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공30-55m)	소유자 변경
13	당초	충북 진천군 진천읍 행정리	733-1	답	1,944	115	경기 수원시 팔달구 매탄동 1162 임광아파트 5동 708호	박진준				구분지상권 (상공26-51m)
							서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행
	변경	충북 진천군 진천읍 행정리	733-1	답	1,944	115	서울 서대문구 연희로15길 91-12(연희동)	이신근	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가) (무교지점)	주식회사 하나은행	구분지상권 (상공26-51m)	소유자 변경

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 상주 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자, 관계인 주소 변경

○ 관계인 삭제

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
관 계 인	안남농협협동조합 등 14명	안남농협협동조합 등 13명	1명 감소

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
25	당초	충북 옥천군 청성면 능월리	254	임	3,514	236	대전 수성구 두산동 789-6 수성동아아파트 8동 503호	육경배	가처분	서울 노원구 월계동 322-1 사슴아파트 403-1201	육원영	구분지상권 (상공10-28m)
	변경	충북 옥천군 청성면 능월리	254	임	3,514	236	대구 수성구 두산동 789-6 수성동아아파트 8동 503호	육경배				구분지상권 (상공10-28m)	소유자 주소변경, 관계인 삭제
47	당초	충북 옥천군 청산면 만월리	산10	임	68,231	572	충북 청주시 사직동 225-1	김기억				구분지상권 (상공09-71m)
							충북 보은군 삼승면 탄금리 253-2	김세구
							대전 중구 보문산공원로 551, 4층(대사동)	이승환
	변경	충북 옥천군 청산면 만월리	산10	임	68,231	572	청주시 사직동 225-1	김기억				구분지상권 (상공09-71m)	소유자 주소변경
							보은군 삼승면 탄금리 258-2	김세구
							대전 중구 보문산공원로 551, 4층(대사동)	이승환
49	당초	충북 보은군 마로면 원정리	산43	임	60,694	431	충북 보은군 마로면 원정리 397	주식회사 성하	근저당권	서울 중구 을지로 66(을지로2가)	중소기업은행	구분지상권 (상공09-33m)
	변경	충북 보은군 마로면 원정리	산43	임	60,694	431	충북 보은군 마로면 원정리 397	주식회사 성하	근저당권	서울 중구 을지로 79(을지로2가)(교대역지점)	중소기업은행	구분지상권 (상공09-33m)	관계인 주소 변경

154kV 북충주-충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>(변경)

1. 사 업 명 : 154kV 북충주-충주 기설송전선로 권원확보사업<3차>

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 소유자명 오기 정정

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
관 계 인	우종수 등 8명	우종수 등 8명	단순 소유자명 변경

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
4	당초	충북 충주시 연수동	산16-34	임	10,145	1,175	경기 양평군 양서면 경강로 1052-7, 201동 206호(명성파크빌)	김현수				구분지상권 (상공25-49m)
	변경	충북 충주시 연수동	산16-34	임	10,145	1,175	경기 양평군 양서면 경강로 1052-7, 201동 206호(명성파크빌)	김헌수				구분지상권 (상공25-49m)	소유자 변경
5	당초	충북 충주시 연수동	산16-35	임	10,145	1,042	인천 연수구 동춘동 920-1 대우3차아파트 104-202	김현수				구분지상권 (상공15-39m)
	변경	충북 충주시 연수동	산16-35	임	10,145	1,042	인천 연수구 동춘동 920-1 대우3차아파트 104-202	김헌수				구분지상권 (상공15-39m)	소유자 변경

345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업(변경)

1. 사 업 명 : 345kV 신옥천-북경남 기설송전선로 권원확보사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전남 나주시 전력로 55

3. 변경사유

○ 지번 및 편입면적 오기 정정

○ 소유자, 관계인 변경

○ 토지분할에 따른 원면적, 편입면적 변경 및 분할 지번 추가

4. 변경내역

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
원면적	12,470,595㎡	12,474,442㎡	3,847㎡증가
편입면적	563,569㎡	563,587㎡	18㎡증가
소유자	이순례 등 551명	이순례 등 561명	10명 증가
관계인	이석도 등 187명	이석도 등 191명	4명 증가
필지수	452필지	460필지	8필지 증가

※ 기타사항 변경없음

5. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

토 지 등 의 명 세 ( 토 지 )
① 번호	② 구분	③ 소재지	④ 지 번	⑤ 지목	면 적		소 유 자		소유권 이외의 권리			⑬ 비고	⑭ 변경사유
					⑥ 원면적 (㎡)	⑦ 편입 면적 (㎡)	⑧ 주 소	⑨ 성 명	⑩ 권리 종류	권 리 자
										⑪ 주소	⑫성명
21	당초	충북 영동군 상촌면 흥덕리	221	답	353	43	인천 부평구 수변로 333, 218동 1904호(삼산동,삼 산타운)	고용주				구분지상권 (상공12-47m)
							인천 부평구 수변로 333, 222동 101호(삼산동,삼산 타운)	김동호
	변경	충북 영동군 상촌면 흥덕리	221	답	353	272	인천 부평구 수변로 333, 218동 1904호(삼산동,삼 산타운)	고용주				구분지상권 (상공12-47m)	편입면적 변경
							인천 부평구 수변로 333, 222동 101호(삼산동,삼산 타운)	김동호
25	당초	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산18-8	도	230	230	충북 영동군 상촌면 흥덕리 17	이재희				구분지상권 (상공24-54m)
	변경	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산18-8	도	230	195	충북 영동군 상촌면 흥덕리 17	이재희					편입면적 변경
26	당초	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산51	임	7,752	2,567	경기 부천시 소사구 경인로463번가길 6-1(괴안동)	박해용				구분지상권 (상공14-50m)
							충북 영동군 상촌면 임산리 354-4 수산빌라-103	이경배
	변경	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산51	임	7,752	1,704	경기 부천시 소사구 경인로463번가길 6-1(괴안동)	박해용				구분지상권 (상공14-50m)	편입면적 변경
							충북 영동군 상촌면 임산리 354-4 수산빌라-103	이경배
27	당초	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산51-1	도	975	141	경북 김천시 덕곡동 1196-1 한마음아파트 101-1404	나병순				구분지상권 (상공21-49m)
								충청북 도
	변경	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산51-1	도	975	15	경북 김천시 덕곡동 1196-1 한마음아파트 101-1404	나병순				구분지상권 (상공21-49m)	편입면적 변경
								충청북 도
51	당초	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산159-4	임	6,586	1,361	충북 영동군 상촌면 흥덕리 116	장진록				구분지상권 (상공33-80m)
	변경	충북 영동군 상촌면 흥덕리	산159-4	임	6,586	1,330	충북 영동군 상촌면 흥덕리 116	장진록				구분지상권 (상공33-80m)	편입면적 변경
		충북 영동군 상촌면 흥덕리	산159-5	임	1,249	31	서울시 마포구 독막로 129(창전동)	김동흡				구분지상권 (상공33-80m)	분할필지 추가
97	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	229	임	476	447	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	구분지상권 (상공35-67m)
									근저당권	서울 용산구 이태원동 211-18	이넥스건설주식회사
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	229	임	476	447	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	서울시 용산구 이태원동 211-18	이넥스건설주식회사	구분지상권 (상공35-67m)	관계인 변경
98	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-2	임	663	75	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	구분지상권 (상공35-63m)
									근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스건설주식회사
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-2	임	663	75	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스건설주식회사	구분지상권 (상공35-63m)	관계인 변경
99	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-3	전	463	293	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	구분지상권 (상공35-63m)
									근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스건설주식회사
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-3	전	463	293	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스건설주식회사	구분지상권 (상공35-63m)	관계인 변경
100	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-4	임	856	68	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	구분지상권 (상공35-63m)
									근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식 회사
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-4	임	856	68	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식회사	구분지상권 (상공35-63m)	관계인 변경
101	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-5	대	1,238	162	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	구분지상권 (상공35-63m)
									근저당권	충북 영동군 상촌면 임산리 445	상촌농업 협동조합
										서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식 회사
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	230-5	대	1,238	162	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	충북 영동군 상촌면 임산리 445	상촌농업 협동조합	구분지상권 (상공35-63m)	관계인 변경
										서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식 회사
105	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	산52-1	임	56,727	32	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	가처분	충북 청주시 흥덕구 산남동 신성미소시 티블루 401호	유옥규	지상권 또는 소유권
						120			근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식 회사	구분지상권 (상공3-33m)
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	산52-1	임	56,727	32	경북 김천시 남면 운곡리 1125-12	조세권	근저당권	서울 용산구 회나무로28 길 1 (이태원동)	이넥스 건설주식 회사	구분지상권 지상권 또는 소유권	관계인 변경
						120						(상공3-33m)임
115	당초	충북 영동군 상촌면 상도대리	산99-1	임	76,502	129	서울 영등포구 여의도동 36 백조아파트 에이동 412호	김선형				지상권 또는 소유권
						3,376						구분지상권 (상공18-51m)
	변경	충북 영동군 상촌면 상도대리	산99-1	임	76,502	129	서울 영등포구 여의도동 36 백조아파트 에이동 412호	김선형				지상권 또는 소유권	편입면적 변경
						3,298						구분지상권 (상공18-51m)
117	당초	충북 영동군 상촌면 고자리	산5-5	임	2,479	215	경북 칠곡군 왜관읍 평장7길 11, 307동 1403호(왜관주공3 단지아파트)	권진희	근저당권	경북 칠곡군 왜관읍 중앙로 220 (남부지점)	왜관농업 협동조합	구분지상권 (상공94-137m)
									지상권
							충북 영동군 상촌면 민주지산로 3019-3	김대현	지상권	경북 칠곡군 왜관읍 중앙로 220 (남부지점)	왜관농업 협동조합
	변경	충북 영동군 상촌면 고자리	산5-25	임	1,558	519	충북 영동군 상촌면 민주지산로 2188-2	김대현	근저당권	대구광역시 달서구 와룡로 98(본리동)	대구대건신용협동조합	구분지상권 (상공94-137m)	토지분할로 편입 지번변경
156	당초	충북 영동군 양강면 죽촌리	626	전	2,402	253	서울 구로구 시흥동 266-725	오원진				구분지상권 (상공27-58m)
	변경	충북 영동군 양강면 죽촌리	626	전	2,402	242	서울 구로구 시흥동 266-725	오원진				구분지상권 (상공27-58m)	토지분할로 편입면적 변경
		충북 영동군 양강면 죽촌리	626-1	전	11	11	서울 구로구 시흥동 266-725	오원진				구분지상권 (상공27-58m)	분할지번 추가
196	당초	충북 영동군 양강면 괴목리	233-1	전	810	244	서울 노원구 중계동 157-35 -2층	김정규				구분지상권 (상공26-60m)
	변경	충북 영동군 양강면 괴목리	233-1	전	790	224	서울 노원구 중계동 157-35 -2층	김정규				구분지상권 (상공26-60m)	토지분할로 원면적, 편입면적 변경
		충북 영동군 양강면 괴목리	233-6	전	20	20		영동군				구분지상권 (상공26-60m)	분할지번 추가
210	당초	충북 영동군 양강면 괴목리	212-1	답	1,438	238	경기 안양시 동안구 호계동 1052 목련아파트 207-1306	최순덕				구분지상권 (상공17-45m)
	변경	충북 영동군 양강면 괴목리	212-1	답	1,438	431	경기 안양시 동안구 호계동 1052 목련아파트 207-1306	최순덕				구분지상권 (상공17-45m)	편입면적변경
308	당초	충북 영동군 심천면 마곡리	산58-1	임	40,677	2,158	카나다국 온타리오 노스옥크 아베뉴 2309 비숍 7	곽호영				구분지상권 (상공9-43m)
	변경	충북 영동군 심천면 마곡리	산58-1	임	40,677	2,153	카나다국 온타리오 노스옥크 아베뉴 2309 비숍 7	곽호영				구분지상권 (상공9-43m)	토지분할로 편입면적 변경
		충북 영동군 심천면 마곡리	산58-5	임	142	142	카나다국 온타리오 노스옥크 아베뉴 2309 비숍 7	곽호영				구분지상권 (상공9-43m)	분할지번 추가
323	당초	충북 옥천군 이원면 수묵리	산47	임	21,818	112	충북 영동군 학산면 학산리 423-3	장구섭				지상권 또는 소유권
							충북 영동군 학산면 마실길 149-18	강순옥
						2,574	경기 양주시 삼숭동 569 성우아파트아침의 미소 110-1205	장원				구분지상권 (상공8-61m)
							경북 김천시 평화동 68-23 건화평화빌라 -301	장은섭
	변경	충북 옥천군 이원면 수묵리	산47	임	21,818	112	충북 영동군 학산면 학산리 423-3	장구섭	가압류	대구 동구 첨단로 7(신서동) (구미지점)	신용보증기금	지상권 또는 소유권	관계인 변경
							충북 영동군 학산면 마실길 149-18	강순옥
						2,574	경기 양주시 삼숭동 569 성우아파트아침의 미소 110-1205	장원				구분지상권 (상공8-61m)
							경북 김천시 평화동 68-23 건화평화빌라 -301	장은섭
324	당초	충북 옥천군 이원면 수묵리	산48	임	23,034	3,989	대전 유성구 송강동 236-3	김민구	가압류	대전 서구 월평동 282-1 나라키움 대전센터 14층,15층	재단법인 신용보증 재단중앙 회	구분지상권 (상공8-56m)
										서울 강남구 강남대로 450(역삼동)	주식회사 국민행복 기금
									압류		대전광역 시대덕구
							경북 포항시 대도동 163-1	김양구
							대전 유성구 송강동 236-3	김영구
							대전 서구 둔산동 220	김준구
	변경	충북 옥천군 이원면 수묵리	산48	임	23,034	3,989	대전 유성구 송강동 236-3	김민구	가압류	대전 서구 월평동 282-1 나라키움 대전센터 14층,15층	재단법인 신용보증 재단중앙 회	구분지상권 (상공8-56m)	관계인 변경
										서울 강남구 강남대로 450(역삼동)	주식회사 국민행복 기금
									압류		대전광역 시대덕구
										강원 원주시 건강로 32(반곡동,국민건강보험공단) (대전동부지사)	국민건강보험공단
							경북 포항시 대도동 163-1	김양구
							대전 유성구 송강동 236-3	김영구
							대전 서구 둔산동 220	김준구
334	당초	충북 옥천군 이원면 개심리	574	답	645	328	충북 옥천군 이원면 개심리 702-2	이계무	말소예고등기		청주지방법원	구분지상권 (상공29-60m)
							충북 옥천군 이원면 지정리 345	이범미
							충북 옥천군 이원면 개심리 727	이성무
							충북 옥천군 이원면 지정리 353-5	이신무
							경기 성남시 분당구 삼평동 726 봇들마을 504-303	이영숙
							충북 옥천군 옥천읍 성암3길 12	이왕무
							서울 영등포구 신길동 347-140	이점무
							대전 동구 성남동 200-18 화이트빌라 -104	이찬무
							서울 종로구 연건동 88-1, 1층 101호	이춘무
							충북 옥천군 이원면 개심리 111	이정영
	변경	충북 옥천군 이원면 개심리	574	답	645	328	충북 옥천군 이원면 개심리 702-2	이계무	말소예고등기		청주지방법원	구분지상권 (상공29-60m)	관계인 변경
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 지정리 345	이범미	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 개심리 727	이성무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 지정리 353-5	이신무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							경기 성남시 분당구 삼평동 726 봇들마을 504-303	이영숙	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 옥천읍 성암3길 12	이왕무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							서울 영등포구 신길동 347-140	이점무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							대전 동구 성남동 200-18 화이트빌라 -104	이찬무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							서울 종로구 연건동 88-1, 1층 101호	이춘무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 개심리 111	이정영	가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
335	당초	충북 옥천군 이원면 개심리	576	답	1,448	141	충북 옥천군 이원면 개심리 702-2	이계무	말소예고등기		청주지방법원	구분지상권 (상공30-58m)
							충북 옥천군 이원면 지정리 345	이범채
							충북 옥천군 이원면 개심리 727	이성무
							충북 옥천군 이원면 지정리 353-5	이신무
							경기 성남시 분당구 삼평동 726 봇들마을 504-303	이영숙
							충북 옥천군 옥천읍 성암3길 12	이왕무
							서울 영등포구 신길동 347-140	이점무
							대전 동구 성남동 200-18 화이트빌라 -104	이찬무
							서울 종로구 연건동 88-1, 1층 101호	이춘무
							충북 옥천군 이원면 개심리 111	이정영
	변경	충북 옥천군 이원면 개심리	576	답	1,448	141	충북 옥천군 이원면 개심리 702-2	이계무	말소예고등기		청주지방법원	구분지상권 (상공30-58m)	관계인 변경
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 지정리 345	이범채	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 개심리 727	이성무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 지정리 353-5	이신무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							경기 성남시 분당구 삼평동 726 봇들마을 504-303	이영숙	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 옥천읍 성암3길 12	이왕무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							서울 영등포구 신길동 347-140	이점무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							대전 동구 성남동 200-18 화이트빌라 -104	이찬무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							서울 종로구 연건동 88-1, 1층 101호	이춘무	말소예고등기		청주지방법원
									가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
							충북 옥천군 이원면 개심리 111	이정영	가처분	충북 옥천군 이원면 지정리 355-1	우봉이씨의열공(휘자성)파종친회
348	당초	충북 옥천군 이원면 개심리	산65-2	임	4,980	1,791	대전 유성구 와룡로136번길 15, 103동 1703호(봉산동,하 늘바람휴먼시아아 파트)	김영일	근저당권 지상권	충북 옥천군 옥천읍 금장로 27	옥천새마 을금고	구분지상권 (상공10-51m)
	변경	충북 옥천군 이원면 개심리	산65-8	임	1,355	191	충북 옥천군 옥천읍 가화3길 18, 104동 14층 1402호(가화현대아파트)	류희자				구분지상권 (상공10-51m)	토지분할로 편입지번 변경
		충북 옥천군 이원면 개심리	산65-9	임	1,526	364	대전 서구 배재로 185, 105동 501호(도마동, 대아아파트)	김영일	근저당권	서울 중구 남대문로 84(을지로 2가) (유성지점)	주식회사국민은행		토지분할로 편입지번 변경
		충북 옥천군 이원면 개심리	산65-10	임	1,877	537	대전 중구 목동로 37, 106동 2205호(목동,목양마을아파트)	김영신					토지분할로 편입지번 변경
		충북 옥천군 이원면 개심리	산65-11	임	1,676	567	대전 서구 청사로281, 221동 105동(둔산동,샘머리아파트)	조용호	근저당권	서울시 중구 남대문로 84(을지로 2가) (유성지점)	주식회사국민은행		토지분할로 편입지번 변경
		충북 옥천군 이원면 개심리	산65-12	임	908	132	대전 중구 목동로 37, 106동 2205호(목동,목양마을아파트)	김영신					토지분할로 편입지번 변경
							대전 서구 배재로 185, 105동 501호(도마동, 대아아파트)	김영일	근저당권	서울시 중구 남대문로 84(을지로 2가) (유성지점)	주식회사국민은행
							충북 옥천군 옥천읍 가화3길 18, 104동 14층 1402호(가화현대아파트)	류희자
							대전 서구 청사로281, 221동 105동(둔산동,샘머리아파트)	조용호
350	당초	충북 옥천군 이원면 개심리	517	전	1,821	515	충북 옥천군 이원면 개심리 700	조동식				구분지상권 (상공31-60m)
							충북 옥천군 이원면 개심리 474-1	조승재
							대전 동구 계족로368번길 11, 208동 301호(성남동,효촌 마을아파트)	조환갑
							충북 옥천군 이원면 개심리 479-2	조원달
							충북 청주시 흥덕구 진재로35번길 41-1, 4층호(복대동)	조환호
							충북 옥천군 이원면 개심리 72	조환숙
	변경	충북 옥천군 이원면 개심리	517	전	1,821	515	충북 옥천군 이원면 개심리 700	조동식				구분지상권 (상공31-60m)	소유자 변경
							충북 옥천군 이원면 개심리 474-1	조승재
							대전 동구 계족로368번길 11, 208동 301호(성남동,효촌 마을아파트)	조환갑
							충북 옥천군 이원면 개심리 479-2	조원달
							충북 청주시 흥덕구 진재로35번길 41-1, 4층호(복대동)	조환호
							충남 천안시 동남구 청수로 15, 103동 504호(청수동,경남아너스빌아파트)	조면재
388	당초	충남 금산군 군북면 상곡리	593	답	1,660	89	대전광역시 대덕구 대화15길 15, 302호(대화동,대운빌라)	고재호				구분지상권 (상공9-38m)
							대전광역시 대덕구 대화15길 15, 302호(대화동,대운빌라)	김미연
	변경	충남 금산군 군북면 상곡리	595	답	2,664	346	대전광역시 대덕구 대화15길 15, 302호(대화동,대운빌라)	고재호				구분지상권 (상공9-38m)	소재지, 원면적, 편입면적 오기 정정
							대전광역시 대덕구 대화15길 15, 302호(대화동,대운빌라)	김미연
435	당초	충북 옥천군 군서면 금산리	산2-1	임	1,181,710	8,769	경기 광주시 장지동 31-1	정용승	소유권이 전청구권 가등기	경기 광주시 장지동 37	동래정씨 통덕랑덕 빈파종중	구분지상권 (상공9-113m)
									가압류	서울 강남구 역삼동 825-18 캠브리지 강남빌딩 18층	주식회사 선진씨엠 씨
										서울 강남구 역삼동 814 (신용지원2 부)	한국자산 관리공사
										서울 강남구 개포동 141 주공아파트 109-103	신문규
									압류		경기도 광주시
											옥천군
										서울 마포구 독막로 311 (염리동 168-9) (경기광주지 사)	국민건강 보험공단
											서울특별 시송파구
									구분 지상권	대전 동구 신안동 264	한국철도 시설공단
	변경	충북 옥천군 군서면 금산리	산2-1	임	1,181,710	8,769	경기 광주시 장지동 31-1	정용승	소유권이 전청구권 가등기	경기 광주시 장지동 37	동래정씨 통덕랑덕 빈파종중	구분지상권 (상공9-113m)	관계인 변경
									가압류	서울 강남구 역삼동 825-18 캠브리지 강남빌딩 18층	주식회사 선진씨엠 씨
										서울 강남구 역삼동 814 (신용지원2 부)	한국자산 관리공사
										서울 강남구 개포동 141 주공아파트 109-103	신문규
									압류		경기도 광주시
										경기 광주시 행정타운로 50(송정동,광주시청)	광주시(세외수입)
											경기광주세무서(재산법인납세과)
											옥천군
										서울 마포구 독막로 311 (염리동 168-9) (경기광주지 사)	국민건강 보험공단
											서울특별 시송파구
									구분 지상권	대전 동구 신안동 264	한국철도 시설공단
441	당초	충북 옥천군 군서면 금산리	산2-2	임	68,430	354	대전 서구 도솔로 483, 203호 (탄방동)	정지우				구분지상권 (상공16-46m)
							경기 성남시 중원구 희망로326번길 24-29	심규용
	변경	충북 옥천군 군서면 금산리	산2-2	임	68,430	354	대전 서구 도솔로 483, 203호 (탄방동)	정지우	지상권	대전 동구 신안동 264	한국철도 시설공단	구분지상권 (상공16-46m)	관계인 변경
							경기 성남시 중원구 희망로326번길 24-29	심규용

[별항] 수용ㆍ사용할 토지 등의 명세서