산업통상자원부 고시 제2023 - 245호

2024년 광해방지사업계획

｢2024년 광해방지실시계획｣에 따라 수립된 ｢2024년 광해방지사업계획｣을   ｢광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률｣ 제8조제5항에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2023년 12월 29일

산업통상자원부장관

1. 사업명칭 : 광해방지사업

2. 사업개요 : 자연환경을 보전하고 국민의 건강증진을 위해 광산개발로 인한 광해를 적극적으로 방지 및 복원하는 사업

3. 사업기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

4. 사업시행자와 그 주소

- 사업시행자 : 한국광해광업공단 등

- 주      소 : 강원도 원주시 혁신로 199

- 연  락  처 : 033-736-5311

5. 광해유형별 사업비

(단위 : 백만원)

단 위 사 업 명	사업비
	광해방지사업비	조기폐광대책비*	총 사업비
1. 폐석･광물찌꺼기유실방지사업	12,534	-	12,534
2. 지반침하방지사업	2,115	640	2,755
3. 오염수질개선사업	18,450	2,300	20,750
4. 토양개량복원사업	15,963	3,070	19,033
5. 먼지날림, 광연 및 소음·진동방지사업	11,168	-	11,168
6. 폐시설물철거사업	280	340	620
7. 산림·토지복구사업	2,624	6,096	8,720
8. 사후관리·운영, 인프라조성	23,708	7,404	31,112
9. 기술개발	1,041	-	1,041
10. 전문광해방지사업자 실적 및 광해방지기술인 경력관리	117	-	117
계	88,000	19,850	107,850

* 대한석탄공사 광해개황조사 및 종합복구대책 수립용역(’23.4.13 ~ ’24.2.7) 수립 결과에 따라, 광해 유형별 물량 및 사업비 등 변경이 가능하며, 변경된 사업내용은 ’24년 광해방지사업계획 변경을 통해 고시 예정

6. 광해방지사업 상세내역

(단위 : 백만원)

순번	사업유형	광산명	지역명	사업기간	’24년 사업단계	’24년 사업비
1	폐석유실방지	한일현대시멘트(주) 영월광산	강원도 영월군 한반도면 일원	’23~’24	시공	1,961
2	폐석유실방지	한라시멘트(주) 한라석회석광산	강원도 강릉시 옥계면 일원	’24	설계, 시공	1,584
3	폐석유실방지	한라시멘트(주) 한라석회석광산	강원도 강릉시 옥계면 일원	’24	설계, 시공	538
4	폐석유실방지	삼표자원개발(주) 삼표삼척고령토광산	강원도 삼척시 근덕면 일원	’24	설계, 시공	1,821
5	광미유실방지	썬시멘트(주)	전라남도 해남군 황산면 일원	’22~’25	시공	375
6	광미유실방지	동원	강원도 정선군 화암면 일원	’24	조사	20
7	광미유실방지	성안	강원도 평창군 평창읍 일원	’24	조사	20
8	광미유실방지	명지	강원도 인제군 기린면 일원	’24	조사	20
9	광미유실방지	정곡광업소	강원도 횡성군 우천면 일원	’24	조사	20
10	광미유실방지	연화	강원도 태백시 동점동 일원	’21~’25	설계, 시공	194
11	광미유실방지	신려	경기도 여주시 북내면 일원	’24	조사	20
12	광미유실방지	서점	경상북도 영덕군 달산면 일원	’24~’27	조사	150
13	광미유실방지	삼풍	경상북도 봉화군 법전면 일원	’24	조사	20
14	광미유실방지	삼룡	경상북도 봉화군 법전면 일원	’24	조사	20
15	광미유실방지	대린(연호)	경상북도 봉화군 법전면 일원	’24	조사	20
16	광미유실방지	지호	경상북도 청송군 안덕면 일원	’24	조사	20
17	광미유실방지	연화(봉화)	경상북도 봉화군 석포면 일원	’14~’24	시공	3,749
18	광미유실방지	부산철광	부산광역시 사하군 괴정동 일원	’22~’25	설계	12
19	광미유실방지	경창	부산광역시 사하군 모라동 일원	’22~’25	설계	50
20	광미유실방지	덕음	전라남도 나주시 공산면 일원	’23~’26	조사	500
21	광미유실방지	순천	전라남도 순천시 서면 일원	’23~’27	조사	96
22	광미유실방지	인대	전라북도 진안군 성수면 일원	’23~’27	설계	62
23	광미유실방지	오마	충청남도 당진시 송산면 일원	’24	조사	20
24	광미유실방지	구만	충청남도 홍성군 광천읍 일원	’20~’26	조사	40
25	광미유실방지	황보	충청남도 홍성군 광천읍 일원	’20~’26	조사	40
26	광미유실방지	보원	충청남도 홍성군 광천읍 일원	’20~’26	조사	40
27	광미유실방지	망월산	충청남도 청양군 장평면 일원	’20~’26	조사	40
28	광미유실방지	금성	충청남도 금산군 금성면 일원	’19~’26	조사	40
29	광미유실방지	덕풍	충청남도 논산시 벌곡면 일원	’19~’26	조사	40
30	광미유실방지	덕풍(2)	충청남도 논산시 벌곡면 일원	’19~’26	조사	40
31	광미유실방지	장재	충청남도 공주시 정안면 일원	’19~’26	조사	40
32	광미유실방지	봉성	충청남도 공주시 이인면 일원	’19~’26	조사	40
33	광미유실방지	(가)용성리	충청남도 공주시 이인면 일원	’19~’26	조사	40
34	광미유실방지	보흥(부흥)	충청남도 공주시 우성면 일원	’19~’26	조사	40
35	광미유실방지	봉화	충청남도 공주시 탄천면 일원	’19~’26	조사	40
36	광미유실방지	석일	충청남도 공주시 탄천면 일원	’19~’26	조사	40
37	광미유실방지	(가)글치기	충청남도 청양군 남양면 일원	’20~’27	설계	30
38	광미유실방지	(가)남산3	충청남도 공주시 탄천면 일원	’19~’27	설계	16
39	광미유실방지	양지	충청남도 보령시 청소면 일원	’19~’26	설계	373
40	광미유실방지	인정	충청남도 보령시 청소면 일원	’19~’26	설계	223
41	광미유실방지	남성	충청북도 옥천군 청성면 일원	’24	조사	20
42	광미유실방지	만명	충청북도 옥천군 청성면 일원	’24	조사	20
43	광미유실방지	환이	충청북도 영동군 추풍령면 일원	’24	조사	20
44	광미유실방지	대황	충청북도 충주시 수안보면 일원	’24	조사	20
45	지반침하방지	(가)덕산리	경상남도 밀양시 초동면 일원	’22~’24	조사	105
46	지반침하방지	통영	경상남도 통영시 동호동 일원	’21~’24	설계	100
47	지반침하방지	일광기장	부산시 기장군 일광면 일원	’24	조사	20
48	지반침하방지	철마	부산시 기장군 일광면 일원	’24	조사	20
49	지반침하방지	기장	부산시 기장군 일광면 일원	’24	조사	20
50	지반침하방지	서교	충청남도 천안시 입장면 일원	’23~’24	조사	175
51	지반침하방지	직산	충청남도 천안시 직산읍 일원	’20~’24	시공	73
52	지반침하방지	(가)앵화동금	충청남도 청양군 장평면 일원	’23~’24	조사	46
53	지반침하방지	충남	충청남도 천안시 안서동 일원	’23~’24	조사	296
54	지반침하방지	구복	충청남도 서천군 비인면 일원	’24	조사	20
55	지반침하방지	(가)가곡리	충청남도 서천군 비인면 일원	’24	조사	20
56	지반침하방지	서천	충청남도 서천군 비인면 일원	’24	조사	20
57	지반침하방지	덕치	충청남도 서천군 비인면 일원	’24	조사	20
58	지반침하방지	덕흥	충청남도 서천군 비인면 일원	’24	조사	20
59	지반침하방지	용마	충청남도 청양군 남양면 일원	’24	조사	20
60	지반침하방지	(가)백금리	충청남도 청양군 남양면 일원	’24	조사	20
61	지반침하방지	(가)봉암1	충청남도 청양군 남양면 일원	’24	조사	20
62	지반침하방지	(가)봉암2	충청남도 청양군 남양면 일원	’24	조사	20
63	지반침하방지	중보	충청북도 충주시 노은면 일원	’24	조사	20
64	지반침하방지	(가)가신리	충청북도 충주시 노은면 일원	’24	조사	20
65	지반침하방지	병옥일신	충청북도 충주시 노은면 일원	’24	조사	20
66	지반침하방지	(가)대덕리	충청북도 충주시 노은면 일원	’24	조사	20
67	지반침하방지	안락	충청북도 충주시 노은면 일원	’24	조사	20
68	지반침하방지	대길	충청북도 청주시 북이면 일원	’24	조사	20
69	지반침하방지	소룡	충청북도 청주시 북이면 일원	’24	조사	20
70	지반침하방지	모정	충청북도 청주시 북이면 일원	’24	조사	20
71	지반침하방지	부암	충청북도 청주시 북이면 일원	’24	조사	20
72	지반침하방지	국일	강원도 삼척시 도계읍 일원	’23~’24	조사	100
73	지반침하방지	신원	강원도 삼척시 도계읍 일원	’20~’24	시공	400
74	지반침하방지	동원-우신	강원도 정선군 고한읍 일원	’21~’24	시공	60
75	지반침하방지	덕수	충청남도 보령시 성주면 일원	’15~’24	시공	240
76	지반침하방지	(가)덕평리	충청북도 괴산군 청천면 일원	’23~’24	조사	100
77	지반침하방지	대한석탄공사 화순광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’28	조사	500
78	지반침하방지	대한석탄공사 장성광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’28	조사	140
79	오염수질개선	㈜성신 자성광산	충청북도 충주시 산척면 일원	’23~’24	시공	54
80	오염수질개선	성신양회(주)	충청북도 단양군 매포읍 일원	’24	설계, 시공	770
81	오염수질개선	㈜세종언더그라운드	충청남도 세종시 부강면 일원	’24	설계, 시공	299
82	오염수질개선	삼양리소스(주) 관인광산	경기도 포천시 관인면 일원	’24	설계, 시공	109
83	오염수질개선	삼양리소스(주) 관인광산	경기도 포천시 관인면 일원	’24~’25	설계, 시공	150
84	오염수질개선	낙동	강원도 정선군 남면 일원	’17~’26	설계	100
85	오염수질개선	삼봉	경상남도 고성군 삼산면 일원	’14~’26	설계	10
86	오염수질개선	금정	경상북도 봉화군 춘양면 일원	’14~’25	시공	890
87	오염수질개선	다덕	경상북도 봉화군 봉성면 일원	’14~’26	설계	10
88	오염수질개선	삼원	전라북도 완주군 경천면 일원	’23~’24	조사	77
89	오염수질개선	수중	충청북도 제천시 수산면 일원	’14~’28	설계	64
90	오염수질개선	흥일	강원도 강릉시 강동면 일원	’16~’26	설계	789
91	오염수질개선	대방	강원도 삼척시 도계읍 일원	’21~’27	조사	117
92	오염수질개선	보령	강원도 영월군 영월읍 일원	’10~’24	시공	1,250
93	오염수질개선	신동	강원도 영월군 김삿갓면 일원	’14~’26	설계	140
94	오염수질개선	옥동선진	강원도 영월군 김삿갓면 일원	’16~’26	설계	100
95	오염수질개선	동원	강원도 태백시 사북읍 일원	’07~’24	시공	4,500
96	오염수질개선	삼탄-만항	강원도 정선군 고한읍 일원	’24~’30	조사	17
97	오염수질개선	동해-남일	강원도 태백시 혈동 일원	’24~’30	조사	17
98	오염수질개선	동해-삼창	강원도 태백시 혈동 일원	’24~’30	조사	16
99	오염수질개선	보성	강원도 태백시 화전동 일원	’18~’26	설계	500
100	오염수질개선	대영-덕천	강원도 태백시 화전동 일원	’18~’26	설계	500
101	오염수질개선	서룡갱	강원도 태백시 화전동 일원	’18~’26	설계	500
102	오염수질개선	협성	강원도 태백시 화전동 일원	’18~’26	설계	500
103	오염수질개선	태안한보	강원도 태백시 통동 일원	’20~’29	조사	75
104	오염수질개선	함태(고갱)	강원도 태백시 황지동 일원	’22~’28	조사	52
105	오염수질개선	함태(소롯골)	강원도 태백시 소도동 일원	’10~’24	조사	20
106	오염수질개선	황지-보림	강원도 태백시 통동 일원	’22~’28	조사	52
107	오염수질개선	석공영월	강원도 평창군 미탄면 일원	’22~’28	조사	52
108	오염수질개선	와룡정원	강원도 동해시 초구동 일원	’10~’29	설계	75
109	오염수질개선	옥동	강원도 영월군 김삿갓면 일원	’23~’25	조사	31
110	오염수질개선	명신	강원도 영월군 상동읍 일원	’21~’29	설계	100
111	오염수질개선	갑정	경상북도 문경시 문경읍 일원	’22~’28	조사	39
112	오염수질개선	봉명신한	경상북도 문경시 호계면 일원	’22~’28	조사	52
113	오염수질개선	석공은성	경상북도 문경시 가은읍 일원	’23~’28	조사	226
114	오염수질개선	봉명삼창	경상북도 문경시 마성면 일원	’24~’30	조사	50
115	오염수질개선	호남광업	전라남도 화순군 한천면 일원	’09~’24	시공	1,600
116	오염수질개선	호남탄좌	전라남도 화순군 한천면 일원	’09~’26	설계	10
117	오염수질개선	무등	전라남도 화순군 청풍면 일원	’17~’26	설계	130
118	오염수질개선	태화	충청남도 보령시 미산면 일원	’11~’24	시공	3,300
119	오염수질개선	태화(오성)	충청남도 보령시 미산면 일원	’11~’26	설계	945
120	오염수질개선	봉양	충청북도 단양군 단성면 일원	’20~’29	설계	100
121	오염수질개선	청산	충청북도 보은군 마로면 일원	’10~’27	설계	10
122	오염수질개선	지원	충청북도 옥천군 청성면 일원	’22~’28	조사	52
123	오염수질개선	대한석탄공사 화순광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’28	설계	1,200
124	오염수질개선	대한석탄공사 장성광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’28	설계	1,100
125	토양오염개량	의림	강원도 정선군 신동읍 일원	’18~’26	설계	1,000
126	토양오염개량	제2연화	강원도 삼척시 가곡면 일원	’20~’25	설계	319
127	토양오염개량	신림(석광)	강원도 원주시 신림면 일원	’21~’24	시공	250
128	토양오염개량	귀명	경상남도 밀양시 하남읍 일원	’22~’24	시공	762
129	토양오염개량	(가)고선리	경상북도 봉화군 소천면 일원	’22~’26	설계	1,000
130	토양오염개량	경동	경상북도 봉화군 소천면 일원	’22~’26	설계	1,200
131	토양오염개량	국일	경상북도 칠곡군 가산면 일원	’10~’24	설계	20
132	토양오염개량	금정	경상북도 봉화군 춘양면 일원	’13~’24	시공	1,250
133	토양오염개량	각희	경상북도 봉화군 춘양면 일원	’13~’24	시공	1,250
134	토양오염개량	금장	경상북도 울진군 온정면 일원	’17~’25	시공	1,000
135	토양오염개량	봉명	경상북도 성주군 수륜면 일원	’13~’24	시공	405
136	토양오염개량	일월	경상북도 영양군 일월면 일원	’13~’24	시공	348
137	토양오염개량	청월	전라남도 보성군 복내면 일원	’13~’24	시공	600
138	토양오염개량	점동	전라남도 광양시 옥룡면 일원	’21~’24	시공	120
139	토양오염개량	석동	전라남도 광양시 옥룡면 일원	’21~’24	시공	120
140	토양오염개량	모악	전라북도 김제시 금산면 일원	’21~’24	시공	138
141	토양오염개량	덕온	전라북도 임실군 신덕면 일원	’21~’24	시공	47
142	토양오염개량	봉화	충청남도 공주시 탄천면 일원	’21~’24	시공	469
143	토양오염개량	병사	충청남도 논산시 노성면 일원	’13~’24	시공	30
144	토양오염개량	임천	충청남도 부여군 장암면 일원	’21~’24	시공	210
145	토양오염개량	수복	충청남도 금산군 복수면 일원	’17~’27	설계	220
146	토양오염개량	청양(청양1)	충청남도 청양군 장평면 일원	’21~’24	시공	112
147	토양오염개량	청양(청양2)	충청남도 청양군 장평면 일원	’21~’24	시공	112
148	토양오염개량	청양(구봉)	충청남도 청양군 남양면 일원	’21~’24	시공	112
149	토양오염개량	청양(대봉)	충청남도 청양군 남양면 일원	’21~’24	시공	112
150	토양오염개량	삼정(용화)	충청북도 영동군 용화면 일원	’13~’24	시공	450
151	토양오염개량	은곡	충청북도 단양군 가곡면 일원	’17~’27	설계	135
152	토양오염개량	덕산	충청북도 제천시 수산면 일원	’24~’27	설계	190
153	토양오염개량	증자동	충청북도 괴산군 감물면 일원	’17~’24	설계	20
154	토양오염개량	대원-대일	충청북도 영동군 상촌면 일원	’21~’24	시공	167
155	토양오염개량	동우성진	강원도 영월군 상동읍 일원	’22~’24	시공	300
156	토양오염개량	동원-덕일	강원도 영월군 산솔면 일원	’17~’24	시공	10
157	토양오염개량	용배	강원도 평창군 미탄면 일원	’17~’24	설계	320
158	토양오염개량	성창광업소	강원도 평창군 미탄면 일원	’21~’25	시공	368
159	토양오염개량	봉명단봉	경상북도 문경시 문경읍 일원	’22~’24	시공	50
160	토양오염개량	석봉성봉	경상북도 문경시 문경읍 일원	’22~’24	시공	100
161	토양오염개량	보은	충청북도 보은군 회남면 일원	’20~’24	시공	18
162	토양오염개량	부국	충청북도 보은군 회인면 일원	’20~’24	시공	537
163	토양오염개량	한보	충청북도 보은군 회남면 일원	’20~’24	시공	172
164	토양오염개량	대한석탄공사 장성광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’28	조사	1,200
165	토양오염개량	대한석탄공사 화순광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’28	조사	1,870
166	토양오염개량	이화석면	강원도 영월군 영월읍 일원	’22~’24	시공	1,400
167	토양오염개량	재정석면	충청남도 보령시 청소면 일원	’15~’25	설계	520
168	토양오염개량	㈜알몬티대한중석	강원도 영월군 상동읍 일원	’23~’24	시공	자부담
169	먼지날림방지	㈜이에프 용연광업소	강원도 삼척시 하장면 일원	’23~’24	시공	90
170	먼지날림방지	쌍용C&E㈜ 영월광업소	강원도 영월군 한반도면 일원	’19~’24	시공	1,411
171	먼지날림방지	㈜태민광업 덕암광업소	강원도 삼척시 하장면 일원	’23~’24	시공	420
172	먼지날림방지	쌍용C&E㈜ 동해석회석광산	강원도 동해시 삼화동 일원	’23~’26	시공	2,500
173	먼지날림방지	㈜삼표시멘트 삼표제1광업소	강원도 삼척시 사직동 일원	’23~’24	시공	1,462
174	먼지날림방지	대성MDI㈜ 삼척사업소	강원도 삼척시 신기면 일원	’23~’24	시공	592
175	먼지날림방지	청림실업㈜ 청삼광업소	강원도 삼척시 도계읍 일원	’23~’24	시공	31
176	먼지날림방지	벽암마인텍㈜ 청산광업소	강원도 태백시 혈동 일원	’24~’25	설계, 시공	463
177	먼지날림방지	㈜태영이엠씨 삼도광업소	강원도 삼척시 도계읍 일원	’24	설계, 시공	164
178	먼지날림방지	㈜충무화학 정선광업소	강원도 정선군 남면 일원	’24~’25	설계, 시공	400
179	먼지날림방지	한일현대시멘트㈜ 삼곡광업소	충청북도 단양군 매포읍 일원	’23~’25	시공	2,500
180	먼지날림방지	㈜성신 청풍광산	충청북도 제천시 금성면 일원	’24	설계, 시공	350
181	먼지날림방지	케이씨씨글라스 가평광업소	경기도 가평군 가평읍 일원	’24~’25	설계, 시공	525
182	먼지날림방지	썬시멘트㈜	전라남도 해남군 황산면 일원	’23~’24	시공	210
183	먼지날림방지	㈜한국분체 완도광업소	전라남도 완도군 노화읍 일원	’24~’25	설계, 시공	50
184	폐시설물철거	대명-동오	경상북도 상주시 화동면 일원	’23~’24	시공	140
185	폐시설물철거	대원	경상북도 상주시 화동면 일원	’23~’24	시공	140
186	폐시설물철거	대한석탄공사 장성광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’30	설계	40
187	폐시설물철거	대한석탄공사 화순광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’30	설계	300
188	산림·토지복구	와룡태우	강원도 강릉시 강동면 일원	’23~’24	시공	100
189	산림·토지복구	와룡-관서	강원도 강릉시 강동면 일원	’24~’25	설계	40
190	산림·토지복구	동원	강원도 정선군 사북읍 일원	’20~’24	시공	1,742
191	산림·토지복구	동해	강원도 태백시 소도동 일원	’20~’25	시공	612
192	산림·토지복구	단양(234)	충청북도 단양군 단양읍 일원	’24~’27	설계	130
193	산림·토지복구	대한석탄공사 장성광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’28	설계	4,396
194	산림·토지복구	대한석탄공사 화순광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’28	설계	1,700
195	사후관리운영	연화	강원도 태백시 장성동 일원	’19~’24	시설운영	70
196	사후관리운영	제2연화	강원도 삼척시 가곡면 일원	’12~’24	시설운영	560
197	사후관리운영	제2연화	강원도 삼척시 가곡면 일원	’24~’27	설계	137
198	사후관리운영	상동	강원도 영월군 상동읍 일원	’09~’27	설계	25
199	사후관리운영	삼보(내리)	경기도 화성시 봉담읍 일원	’17~’24	시설운영	150
200	사후관리운영	삼보(상리)	경기도 화성시 봉담읍 일원	’20~’25	시공	1,000
201	사후관리운영	삼산제일	경상남도 고성군 삼산면 일원	’22~’25	조사	65
202	사후관리운영	쌍전	경상북도 울진군 금강송면 일원	’22~’27	안정성평가	30
203	사후관리운영	울진	경상북도 울진군 북면 일원	’14~’24	시설운영	108
204	사후관리운영	옥동	경상북도 의성군 옥산면 일원	’13~’24	시설운영	75
205	사후관리운영	달성	대구광역시 달성군 가창면 일원	’10~’26	시공	2,000
206	사후관리운영	일광	부산광역시 기장군 일광면 일원	’17~’24	시설운영	107
207	사후관리운영	일광	부산광역시 기장군 일광면 일원	’22~’25	시공	100
208	사후관리운영	점동	전라남도 광양시 광양읍 일원	’19~’27	설계	50
209	사후관리운영	천보	충청남도 천안시 입장면 일원	’21~’24	설계	20
210	사후관리운영	영동	강원도 강릉시 강동면 일원	’07~’24	시설운영	750
211	사후관리운영	와룡구룡	강원도 강릉시 강동면 일원	’10~’26	설계, 시공	700
212	사후관리운영	와룡산업	강원도 강릉시 강동면 일원	’14~’26	설계, 시공	700
213	사후관리운영	와룡태우	강원도 강릉시 강동면 일원	’13~’24	시설운영	700
214	사후관리운영	삼마태정	강원도 삼척시 도계읍 일원	’17~’25	설계	100
215	사후관리운영	보령	강원도 영월군 영월읍 일원	’24	시설운영	50
216	사후관리운영	경일(고토일)	강원도 정선군 고한읍 일원	'12~'24	시설운영	70
217	사후관리운영	경일(본갱)	강원도 정선군 고한읍 일원	'12~'24	시설운영	30
218	사후관리운영	나전	강원도 정선군 북평면 일원	'03~'24	시설운영	549
219	사후관리운영	동원	강원도 정선군 사북읍 일원	'05~'24	시설운영	880
220	사후관리운영	삼탄(갱내수)	강원도 정선군 고한읍 일원	’14~’25	시설운영	696
221	사후관리운영	삼탄(갱내수)	강원도 정선군 고한읍 일원	’20~’26	설계, 시공	2,500
222	사후관리운영	삼탄(침출수)	강원도 정선군 고한읍 일원	’17~’24	시설운영	980
223	사후관리운영	석공함백	강원도 정선군 신동읍 일원	’07~’24	시설운영	539
224	사후관리운영	신태일	강원도 정선군 정선읍 일원	’14~’24	시설운영	70
225	사후관리운영	성원	강원도 태백시 화전동 일원	’19~’24	시설운영	60
226	사후관리운영	태안한보	강원도 태백시 통동 일원	’17~’24	시설운영	528
227	사후관리운영	함태	강원도 태백시 소도동 일원	’04~’24	시설운영	700
228	사후관리운영	함태(소롯골)	강원도 태백시 소도동 일원	’10~’24	시설운영	600
229	사후관리운영	일월	경상북도 봉화군 재산면 일원	’11~’26	시공	2,000
230	사후관리운영	호남광업	전라남도 화순군 한천면 일원	’24	시설운영	1,120
231	사후관리운영	대덕	전라북도 완주군 비봉면 일원	’19~’24	시설운영	450
232	사후관리운영	태화	충청남도 보령시 미산면 일원	’24	시설운영	5
233	사후관리운영	단양	충청북도 단양군 단양읍 일원	’13~’24	시설운영	35
234	사후관리운영	대한석탄공사 장성광업소	강원도 태백시 장성동 일원	’24~’28	설계 및 운영	2,400
235	사후관리운영	대한석탄공사 화순광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’24~’28	설계 및 운영	4,800
236	인프라	대한석탄공사 화순광업소	전라남도 화순군 동면 일원	’23~’24	종합복구대책	204

※ 광해분석 및 기술개발 등 제외(5,557백만원) 및 광해방지의무자 자부담 100% 1개소 반영((주)알몬티대한중석, 토양정화사업)

7. 「광산피해 방지 및 복구에 관한 법률」 제19조에 따라 수용하거나 사용할 토지 등의 세목

* 향후 수용하거나 사용할 토지가 있을 경우 별도 고시 예정