◉산업통상자원부고시제2020-221호

전원개발사업 실시계획 승인(변경)

① 지식경제부 고시 제2012-204호(’12.08.27), 산업통상자원부 고시 제2016-197호(’16.10.31), 산업통상자원부 고시 제2020-92호(’20.06.12)로 고시한 바 있는 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업, ② 산업통상자원부 고시 제2015-105호(’15.06.10), 산업통상자원부 고시 제2017-48호(’17.04.10), 산업통상자원부 고시 제2018-42호(’18.03.23), 산업통상자원부 고시 제2019-59호(’19.04.24), 산업통상자원부 고시 제2019-195호('19.11.26)로 고시한 바 있는 154kV 강화-서강화 송전선로 건설사업, ③ 산업통상자원부 고시 제2018-121호(’18.06.25), 산업통상자원부 고시 제2019-137(’19.08.30)로 고시한바 있는 154kV 덕림분기 송전선로 건설사업, ④ 지식경제부 고시 제2011-231호(’11.11.09), 산업통상자원부 고시 제2017-108호(’17.08.10), 제2019-205호(‘19.12.13)로 고시한 바 있는 154kV 봉담분기 송전선로 건설사업, ⑤ 산업통상자원부 고시 제2018-163호(’18.09.07)로 고시한바 있는 345kV 신송산분기 송전선로 건설사업, ⑥ 산업통상자원부 고시 제2017-84호(‘17.06.13), 산업통상자원부 고시 제2019-195호(’19.11.26)로 고시한바 있는 154kV 직산변전소 및 분기 송전선로 건설사업, ⑦ 지식경제부 고시 제2011-231호(’11.11.09), 산업통상자원부 고시 제2015-228호(’15.10.30), 산업통상자원부 고시 제2017-170호(’17.12.04), 산업통상자원부 고시 제2018-171호(’18.09.21), 산업통상자원부 고시 제2019-218호(’19.12.31)로 고시한 바 있는 154kV 창원, 월림 인출변경 송전선로 건설사업, ⑧ 지식경제부 고시 제2011-35호(’11.03.14), 산업통상자원부 고시 제2015-228호(’15.10.30), 산업통상자원부 고시 제2017-139호(’17.09.27), 산업통상자원부 고시 제2018-220호(’18.11.30), 산업통상자원부고시 제2020-59호(’20.04.29)로 고시한 바 있는 154kV 천선분기 송전선로 건설사업, ⑨ 지식경제부 고시 제2011-231호(’11.11.09), 산업통상자원부 고시 제2015-90호(’15. 5.13), 산업통상자원부 고시 제2017-48호(’17. 4.10), 산업통상자원부 고시 제2018-14호(’18. 2.13), 산업통상자원부 고시 제2019-15호(’19. 1.17), 산업통상자원부 고시 제2019-59호(’19. 4.24), 산업통상자원부 고시 제2019-205호(’19.12.13)로 고시한 바 있는 345kV 창원변전소 건설사업, ⑩ 산업통상자원부 고시 제2015-120호(’15. 6.22), 산업통상자원부 고시 제2018-14호(‘18. 2.06), 산업통상자원부 고시 제2019-205호(’19.12.13)로 고시한 바 있는 154kV 의창변전소 건설사업, ⑪ 산업통상자원부 고시 제2018-76호(’18. 4.26), 산업통상자원부 고시 제2019-205호(’19.12.13)로 고시한 바 있는 154kV 세종분기 송전선로 건설사업, ⑫ 산업통상자원부 고시 제2017-108호(’17. 8.10), 산업통상자원부 고시 제2018-76호(’18. 4.26), 산업통상자원부 고시 제2019-205호(’19.12.13)로 고시한 바 있는 154kV 북안산변전소 및 분기 송전선로 건설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가지리정보 보안관리지침(지식경제부 훈령 제50호) 제9조 및 제10조에 의거 전력․통신․가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2020년 12월 29일

산업통상자원부장관

① 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 갈사분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 사업 편입부지 지번 분할에 따른 지번 및 소유주 변경

나. 갈사만 조선 산업단지 내 송전선로 고시 지연에 따른 사업기간 확보

4. 변경내역

가. 소재지번 및 소유주

변 경 전		변 경 후		비 고
소재지번	소유주	소재지번	소유주	구분지상권 (지상25-64m) 편입면적 (68㎡)
경상남도 하동군 금성면 가덕리 776(도)	국유지 (건설부)	경상남도 하동군 금성면 가덕리 776-6(장)	한국남부발전 주식회사

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

[별항] 수용․사용할 토지 등의 명세 및 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 154kV 갈사분기 송전선로
1 (3∼4)	경상남도 하동군 금성면 가덕리	776	도	779	68	0	국유지	건설부				고시해제	지번 분할에 따른 지번 및 토지 소유주 변경
2 (3∼4)	경상남도 하동군 금성면 가덕리	776-6	장	406	0	68	부산광역시 남구 문현금융로 40, 30층∼35층	한국남부발전주식회사				고시변경 구분지상권 (지상25-64m)

② 154kV 강화-서강화 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 강화-서강화 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유

가. 16호 철탑 형식 변경 (4각 철탑 → 관형지지물)에 따라 편입면적 조정

나. 토지 소유주와의 원활한 협의를 위한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

변 경 항 목		변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간		’15.05 ∼’20.12(68개월)	’15.05 ∼’21.12(80개월)	12개월 연장
선 로 길 이		9.927㎞	좌 동	-
철 탑 기 수		29기 [철탑 29기 (4회선 : 28기, 2회선 1기)]	좌 동	-
사 업 면 적	철 탑	13,001 ㎡	12,734 ㎡	267 ㎡ 감소
	선하지	146,288 ㎡	146,503 ㎡	215 ㎡ 증가
	계	159,289 ㎡	159,237 ㎡	52 ㎡ 감소

나. 사업면적 및 위치변경

철 탑 번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감
16	강화군 불은면 삼성리 1027-42	대	26,049	3	0	-3	고시해제
16	강화군 양도면 인산리 217-7	대	9,918	345	81	-264	면적변경
소 계			35,967	348	81	-267

(1) 철탑부지

(2) 선하지

철 탑 번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감
16∼17	강화군 양도면 인산리 217-7	대	9,918	975	1,190	215	면적변경
소 계			9,918	975	1,190	215

5. 도시․군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서 : 별항

6. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 도시․군계획시설(전기공급설비) 결정(변경) 조서

1. 철탑부지

사업명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간	규모(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감
154㎸ 강화-서강화 송전선로 건설사업	변경	고압선	강화군 불은면 삼성리 1027-42	3	0	-3	계획관리지역
			강화군 양도면 인산리 217-7	345	81	-264	계획관리지역
소 계				348	81	-267

사업명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증감
154㎸ 강화-서강화 송전선로 건설사업	변경	고압선	강화군 양도면 인산리 217-7	975	1,190	215	계획관리지역
소 계				975	1,190	215

2. 선하지

[별항] 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
1 (16)	강화군 불은면 삼동암리	1027-42	대	26,049	3	0	강화군					고시해제 (지상권 또는 소유권)	철탑형식 변경에 따른 편입면적 조정
2 (16)	강화군 양도면 인산리	217-7	대	9,918	345	81	강화군					면적변경 (지상권 또는 소유권)

1. 철탑부지

2. 선하지

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
1 (16∼17)	강화군 양도면 인산리	217-7	대	9,918	975	1,190	강화군					구분지상권 (20-58)m (면적변경)	철탑형식 변경에 따른 선하지 면적 조정

③ 154kV 덕림분기 송전선로 건설공사(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 덕림분기 송전선로 건설공사

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동120)

3. 변경사유 : 지역주민 민원에 따른 공정지연 및 훼손지 복구를 위한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018. 6 ∼ 2020. 12 (31개월)	2018. 6 ∼ 2021. 12 (43개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

④ 154kV 봉담분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 봉담분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유 : 편입부지 추가 및 권원확보를 위한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2011. 10 ∼ 2020. 12 (111개월)	2011. 10 ∼ 2021. 12 (123개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑤ 345kV 신송산분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 신송산분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유 : 휴전 미승인에 따른 공사지연을 반영하여 사업기간 변경

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2018 .05 ∼2020. 12(32개월)	2018. 05 ∼ 2021. 12(44개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑥ 154kV 직산변전소 및 분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 직산변전소 및 분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유 : 집단민원에 의한 공정 지연 등 사업지연에 따른 사업 시행기간 확보

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2017 .06 ∼2020. 12(43개월)	2017. 06 ∼ 2021. 12(55개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑦ 154kV 창원, 월림 인출변경 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 창원, 월림 인출변경 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동120)

3. 변경사유 : 용지 추가보상에 따른 토지소유주와의 원활한 협의를 위한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2011. 10 ∼ 2020. 12 (111개월)	2011. 10 ∼ 2021. 12 (123개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑧ 154kV 천선분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 천선분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동 120)

3. 변경사유 : 용지확보 및 철탑부지 복구공사 기간을 고려한 사업기간 연장

4. 변경내역

가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간	2011. 02 ∼ 2020. 12 (119개월)	2011. 02 ∼ 2021. 12 (131개월)	12개월 연장

나. 기타 : 다른 항목 변경사항 없음

⑨ 345kV 창원변전소 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 창원변전소 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유 : 확정측량 및 지적분할 결과를 반영하여 사업면적 변경

4. 변경내역

□ 사업면적

변 경 전	변 경 후	비 고
35,299 ㎡	35,214 ㎡	85㎡ 감소

변 경 내 용 비 교 표

1. 토지 증감표

○ 변전소

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
임	7,519	188	7,707	7,519	188	7,707	0
제	0	194	194	0	194	194	0
유	13	1,295	1,308	13	1,295	1,308	0
전	110	1,164	1,274	110	1,164	1,274	0
묘	1,410	0	1,410	1,410	0	1,410	0
답	18,919	0	18,919	18,850	0	18,850	-69
과	432	23	455	431	23	454	-1
구	0	4,032	4,032	0	4,017	4,017	-15
합 계	28,403	6,896	35,299	28,333	6,881	35,214	-85

2. 토지이외의 물건 증감표 : 해당사항 없음

3. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 변경명세

○ 변전소

[단위 : ㎡]

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(면적)			비 고
				당 초	변 경	증 감
345㎸ 창원변전소 건설사업	변경	변전소	경남 창원시 성산구 양곡동 371	906	0	-906	자연녹지지역
			경남 창원시 성산구 양곡동 371-2	0	837	837	자연녹지지역
			경남 창원시 성산구 양곡동 406	17	0	-17	자연녹지지역
			경남 창원시 성산구 양곡동 406-3	0	16	16	자연녹지지역
			경남 창원시 성산구 양곡동 1132-9	1,529	0	-1,529	자연녹지지역
			경남 창원시 성산구 양곡동 1132-13	0	1,514	1,514	자연녹지지역
소 계				2,452	2,367	-85

4. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 345kV 창원변전소 건설사업
1	경상남도 창원시 성산구 양곡동	371	답	19	906	0	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사					확정측량 및 지적분할 결과를 반영하여 사업면적 변경
2	경상남도 창원시 성산구 양곡동	371-2	답	837	0	837	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사				소유권
3	경상남도 창원시 성산구 양곡동	406	과	807	17	0	전북 전주시 덕진구 솔내로 120, 430동 1106호(송천동1가 현대4차아파트)	임말자	지상권	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사
							경남 창원시 의창구 사림로57번길 18-21 (사림동)	임윤희
4	경상남도 창원시 성산구 양곡동	406-3	과	16	0	16	전남 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력공사				소유권
5	경상남도 창원시 성산구 양곡동	1132-9	구	15	1,529	0		국토 교통부
6	경상남도 창원시 성산구 양곡동	1132-13	구	1,514	0	1,514		국토 교통부				소유권

⑩ 154㎸ 의창변전소 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154㎸ 의창변전소 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 고시면적 오기로 인한 정정

나. 도로구역과 중복 편입된 부지 제외에 따른 고시해제

4. 변경내역

□ 사업면적

변 경 전	변 경 후	비 고
2,980㎡	2,762㎡	218㎡ 감소

변 경 내 용 비 교 표

1. 토지 증감표

○ 변전소

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
도	152	740	892	152	732	884	-8
답	935	822	1757	935	623	1558	-199
구	0	267	267	0	267	267	0
묘	0	64	64	0	53	53	-11
합 계	1,087	1,893	2,980	1,087	1,675	2,762	-218

2. 토지이외의 물건 증감표 : 해당사항 없음

3. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 변경명세 : 해당사항 없음

4. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 154kV 의창변전소 건설사업
1	경상남도 창원시 의창구 도계동	563-2	도	86	94	86	전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력 공사				소유권	오기정정
2	경상남도 창원시 의창구 도계동	565-2	묘	11	11	0	시유지	창원시				소유권	고시해제
3	경상남도 창원시 의창구 도계동	563-8	답	199	199	0	시유지	창원시				소유권

⑪ 154kV 세종분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154㎸ 세종분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 고시면적 오기로 인한 정정

나. C/H 부지조성 공법 변경에 따른 C/H 부지면적 축소

4. 변경내역

□ 사업면적

변 경 전	변 경 후	비 고
20,940 ㎡	20,715 ㎡	225㎡ 감소

변 경 내 용 비 교 표

1. 토지 증감표

1) 철탑

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
구	0	0	0	0	0	0	0
답	0	0	0	0	0	0	0
도	0	35	35	0	35	35	0
임	1,473	0	1,473	1,336	0	1,336	-137
공장용지	0	0	0	0	0	0	0
전	1,256	0	1,256	1,238	0	1,238	-18
합 계	2,729	35	2,764	2,574	35	2,609	-155

2) 전력구

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
구	0	0	0	0	0	0	0
답	0	0	0	0	0	0	0
도로	0	153	153	0	83	83	-70
임야	0	0	0	0	0	0	0
공장용지	0	0	0	0	0	0	0
전	0	0	0	0	0	0	0
합 계	0	153	153	0	83	83	-70

2. 토지이외의 물건 증감표 : 해당사항 없음

3. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 변경명세

1) 철탑부지

(단위 : ㎡)

사업명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(면적)			비 고
				당 초	변 경	증 감
154㎸ 세종분기 송전선로 건설사업	변경	고압선	세종 부강면 금호리 670-1	903	0	-903	생산관리지역 (필지분할 670-1 → 670-1, 2번지로 분할)
			세종 부강면 금호리 670-2	0	875	+875
			세종 부강면 금호리 산67-5	247	119	-128	생산관리지역
			세종 부강면 금호리 673-2	353	363	+10	계획관리지역
			세종 부강면 금호리 673-1	9	0	-9	계획관리지역
소 계				1,512	1,357	-155

2) 전력구

(단위 : ㎡)

사업명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(면적)			비 고
				당 초	변 경	증 감
154㎸ 세종분기 송전선로 건설사업	변경	고압선	세종 부강면 금호리 672-1	37	0	-37	계획관리지역
			세종 부강면 금호리 672-2	29	4	-25	계획관리지역
			세종 부강면 금호리 839-4	87	79	-8	계획관리지역
소 계				153	83	-70

4. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

1. 철탑부지

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지 목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
										⑩ 주 소	⑪ 성 명
					당초	변경
■ 154kV 세종분기 송전선로 건설사업
1 (C/H)	부강면 금호리	670-1	전	3,978	903	0	세종 부강면 금호리735	최인복				변경전 지상권 또는 소유권	C/H 부지면적 축소 및 필지분할 (670-1 → 670-1, 2번지로 분할)
												변경후 구분 지상권 (20m∼68m)
	부강면 금호리	670-2	전	1,212	0	875	세종 부강면 금호리735	최인복				지상권 또는 소유권
2 (C/H)	부강면 금호리	산67-5	임	1,427	247	119	세종 부강면 금호리355	최인화				지상권 또는 소유권	C/H 부지면적 축소
3 (C/H)	부강면 금호리	673-2	전	559	353	363	충북 청주시 흥덕구 분평로18, 704동 304호	진병철				지상권 또는 소유권	오기정정
4 (C/H)	부강면 금호리	673-1	임	182	9	0	충북 청주시 서원구 분평로18, 704동 304호	진병철				고시해제	C/H 부지면적 축소

2. 전력구

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지 목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
										⑩ 주 소	⑪ 성 명
					당초	변경
■ 154kV 세종분기 송전선로 건설사업
1	부강면 금호리	672-1	도	238	37	0	세종 한누리대로 2130	세종 특별 자치시				고시해제	C/H 부지면적 축소
2	부강면 금호리	672-2	도	102	29	4	세종 한누리대로 2130	세종 특별 자치시				지상권 또는 소유권
3	부강면 금호리	839-4	도	1,597	87	79	세종 도움6로11	국토 교통부				지상권 또는 소유권

⑫ 154kV 북안산 변전소 및 분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 북안산 변전소 및 분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 종 갑

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

가. 변전소 건물 위치 이동에 따른 인ㆍ출입 송전선로 위치 변경

나. 변전소 부지 일부 용도 폐지에 따른 고시해제

4. 변경내역

□ 사업면적

변 경 전	변 경 후	비 고
10,019 ㎡	9,821 ㎡	198㎡ 감소

변 경 내 용 비 교 표

1. 토지 증감표

1) 변전소

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
도	0	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0
전	0	3,888	3,888	0	3,685	3,685	-203
답	0	759	759	0	759	759	0
합 계	0	5,947	5,947	0	5,744	5,744	-203

2) 철탑부지 : 변동없음

3) 선하지

(단위 : ㎡)

구분 지목	변 경 전			변 경 후			증 감
	사유지	국․공유지	계	사유지	국․공유지	계
도	0	2,883	2,883	0	3,071	3,071	188
전	541	0	541	541	0	541	0
답	367	183	550	367	0	367	-183
합 계	908	3,066	3,974	908	3,071	3,979	5

2. 토지이외의 물건 증감표 : 해당사항 없음

3. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 변경명세

○ 선하지

[단위 : ㎡]

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규모(면적)			비 고
				당 초	변 경	증 감
154㎸ 북안산 변전소 및 분기 송전선로 건설사업	변경	고압선	경기 안산시 상록구 양상동 159-47	24	0	-24	도시지역 자연녹지
			경기 안산시 상록구 양상동 159-58	26	0	-26
			경기 안산시 상록구 양상동 159-59	133	0	-133
			경기 안산시 상록구 양상동 162	307	338	31
			경기 안산시 상록구 양상동 162	1,256	1,413	157
소 계				1,746	1,751	5

4. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 수용·사용할 토지 등의 명세서

토 지 등 의 명 세 (토 지)
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지목	지 적(㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)	⑬ 변경 사유
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명
■ 154kV 북안산변전소
5	경기도 안산시 상록구 양상동	160-2	전	726	726	523	전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)	한국전력 공사					부지일부 용도폐지
■ 154kV 북안산 분기 송전선로
1	경기 안산시 상록구 양상동	159-47	답	73	24	0	세종 도움6로 11	국토 교통부				구분지상권 (11-36m)	변전소 건물 위치이동에 따른 선하지 변경
2	경기 안산시 상록구 양상동	159-58	답	301	26	0	세종 도움6로 11	국토 교통부				구분지상권 (11-41m)
3	경기 안산시 상록구 양상동	159-59	답	202	133	0	세종 도움6로 11	국토 교통부				구분지상권 (11-47m)
4 (27-1)	경기 안산시 상록구 양상동	162	도	39,372	307	338	세종 도움6로 11	국토 교통부				구분지상권 (11-58m)
5 (27-2)	경기 안산시 상록구 양상동	162	도	39,372	1,256	1,413	세종 도움6로 11	국토 교통부				구분지상권 (11-58m)